수도권 신국제공항 영종대교(가칭) 및 부지조성 실시설계

=====================================================

교  통  부

0 교통부가 2000년대 수도권 지역의 항공수요에 대비코자 인천직할시

중구 영종.용유도 일원 간석지상에 건설코자 하는 수도권 신국제공항의

기본설계가 계획대로 추진되고 있다.

국내종합건설기술 용역업체인 (주)유신설계공단과 미국의 Bechtel

International이 참여하고 있는 기본설계용역은 '90.11.20 착수되어

'91.12.24 완료될 예정으로 있으며 '91.8말 현재 82%의 진척률을 보이고

있다.

0 수도권 신국제공항 기본설계에서는 공항의 활주로, 계류장, 여객청사 등

주요시설의 규모와 배치계획이 검토되고 있으며 공항시설 우측에는 약

11만명 수용규모의 공항배후지원단지계획이 구체화되어 가고 있다.

이와 관련하여 교통부는 금일('91.9.26) 수도권 신국제공항과 인천직할시

를 연결하는 영종대교(가칭)의 기본설계 현상응모요령 및 설계지침에 대한

설명회를 가졌다.

설명회시 교통부가 제시한 영종대교(가칭)는 인천직할시 구역내의 정도.

호도 및 장도를 연결하는 약 3.75km 길이의 장대교량으로 도로 8차선, 철

도복선을 수용하는 대형특수구조물이다.

0 교통부 관계자는 이번 현상공모의 의의에 대해 영종대교(가칭)는 도로 및

철도 병용의 장대교량으로 국내외에 동일 규모의 교량 건설예가 드문 고

도의 전문기술이 요구되는 대형특수구조물일 뿐만 아니라 국제관문인 영종

도 신국제공항과 수도 서울을 연결하는 주요 출입로인 점을 감안 새로이

건설되는 교량은 우리의 국력신장과 전통문화의 상징성을 부각하면서 동시

에 주변경관과도 조화를 이루는 아름다운 모습이어야 하므로 널리 창의적

이고 참신한 Idea를 찾고자 현상공모를 시행하게 되었다고 말했다.

영종대교의 설계용역비는 52억원으로 금년 11월중에 현상공모설계안을 심

사, 최적설계 당선업체에게는 이 교량의 실시설계권을 부여하고 우수작 2

점에게는 상금 3,000만원씩을 각각 수여하며, 금년 12월중에 설계에 착수

할 예정이다.

0 한편 내년 9월경에 착수하게 되는 수도권 신국제공항건설을 위한 부지조

성공사에 대비해서 시행하는 부지조성 실시설계용역은 지난 9.18 국내

17개 종합건설기술 용역업체에게 용역제의서 제출을 요청한 바 있으며,

'91.9.30까지 용역제의서 모두를 제출받아 이를 심사, 이중 2-3개 우수업

체에게 입찰기회를 부여하여 가격경쟁입찰을 통하여 부지조성공사 실시

설계 담당용역업체를 선정할 예정으로 있다.

부지조성 실시설계용역의 용역비는 32억원으로 금년 10월중에 착공할 계획

이며 이 설계용역에서 공사의 도급시행에 필요한 도면과 시방서 등이 작성

된다.