수도권 도로망 확충사업

======================

건설부는 현재 심각한 도로정체현상을 빚고 있는 수도권내의 교통난을 완화하기

위해 '90년대 중반까지 수도권도로망체계를 완성시키기로 하고, 총규모 6조여억원의

사업비를 들여 수도권내의 고속도로, 국도, 신도시연결 도로등 33개노선 516km를

신설 또는 확장키로 했다

이진설 건설부장관은 이 같은 수도권도로망의 조기확충방안과 관련 27일 상오 서울

지방국토관리청 회의실에서 서울특별시 및 인천직할시의 부시장, 경기도 부지사 및

한국도로공사, 한국토지개발공사등 관계관회의를 열고

금년에 추경예산으로 확보된 도로사업비 7,113억원 가운데 52%인 3,715억원을 수도권

지역에 집중투자하여 서울-수원 및 서울-인천간 국도확장등 22개노선 223km를 당초

준공기한보다 6개월 내지 1년6개월간 앞당겨 '92년말까지 조기 완공토록 하라고

강력히 지시했다

이날 회의는 또한 현재 공사를 추진하고 있는 여타 고속도로 및 국도 신증설구간

가운데 서울외곽순환고속도로의 경우 안양-일산, 일산-퇴계원간을 제외한 13개노선

144km도 오는 '93년 및 '94년까지 완공키로 했다

이장관은 경인고속도로의 신월-부평간 확장공사에 이어 부평-서인천간 확장공사도

내년에 착공 '93년까지는 공사를 마무리 하도록 하고 서울시가 추진하고 있는 신월-

목동간 확장공사도 경인고속도로 확장공사의 공기에 맞추어 내년 7월까지 준공토록

관계관에 지시했다

이장관은 오늘 '94년까지는 수도권내의 교통망이 정비확충되므로 현재의 심각한 교통

난이 획기적으로 개선될 것으로 전망되며 한편 오는 2001년에는 서울외관순환 고속

도로망 체계를 완성하여 도심통과 교통량을 대폭축소시켜 서울도심 교통난을 완화

하는데 크게 기여할 것이라 말했다

이날 협의된 수도권내 도로확장공사 완공시기는 다음과 같다

수도권 도로망 확장사업

-----------------------

'91년 완공사업

==============

0 고속도로건설 ('91.11 준공예정)

- 판교 - 구리

- 신갈 - 안산

0 국도포장

- 수원 - 광주

'92년 완공사업

==============

0 고속도로확장('92.7 준공예정)

- 경인고속도로 (신월 - 부평)

- 경부고속도로 (양재 - 수원)

0 국도확장

- 양촌 - 개화                     - 서울 - 인천

- 부천 - 개화                     - 행주 - 능곡

- 반월 - 군포                     - 행주대교

- 수원 - 군포                     - 군포 - 인덕원

- 성남 - 광주                     - 군포 - 안양

- 광주 - 곤지암

0 신도시 연결도로

- 서오능 - 일산                   - 양재 - 분당

- 수색 - 일산                     - 장지 - 분당

- 성산대교 - 일산

0 지방도

- 쓰레기수송로                    - 과천 - 양재

- 의왕 - 과천                     - 광명 - 논곡

'93년 완공사업

==============

0 고속도로건설

- 서해안고속도로 (인천 - 안산)

- 경부고속도로 (한남 - 양재)

0 국도확장

- 능곡 - 벽제                     - 이천 - 곤지암

0 지방도건설

- 팔당대교

'94년 완공사업

==============

0 고속도로건설

- 구리 - 퇴계원                   - 시흥 - 안산

- 제2경인고속도로

- 서울외곽순환고속도로(판교 - 안양)

0 국도확장

- 도농 - 양평                     - 하남우회도로

0 신도시 연결도로

- 포이 - 내곡                     - 화양동 - 장지

'96년 완공사업

==============

0 고속도로건설

- 서울외곽순환고속도로 (안양 - 일산)

2001년 완공사업

===============

0 고속도로건설

- 서울외곽순환고속도로 (일산 - 퇴계원)

수도권 도로망 확충계획

======================                (단위 : 억원)

-------------------------------------------------------------------------------

|               |     |      |        |            년차별 투자계획

번|   노   선     |연장 | 차선 | 사 업  |--------------------------------------

|               |(km) |      | 기 간  |      |     |        '91       |

호|               |     |      |        |전 체 |'90  | -----------------|'92

|               |     |      |        |      |까지 |  계  |당 초|추 경|이후

--|---------------|-----|------|--------|------|-----|------|-----|-----|-----

|      계       |516.9|      |        |60,933|7,147|11,559|7,844|3,715|42,227

|               |     |      |        |      |     |      |     |     |

|1.고속도로건설 |237.2|      |        |45,667|4,534| 5,677|2,930|2,747|35,456

|  <신설>       |199.3|      |        |43,622|3,922| 4,945|2,198|2,747|34,755

| -서울외곽순환 |120.5|      |        |31,521|2,037| 1,951|  851|   - |27,533

|  .판교-구리   | 23.5|   4  |'88-'91 | 2,464|1,965|   499|  499|   - |    -

|  .구리-퇴계원 |  5.0|   4  |'90-'94 | 1,352|   75|   252|  252|   - | 1,028

|  .판교-일산   | 57.1|   8  |'91-'96 |14,730|   - | 1,200|  100|1,100|13,530

|  .일산-퇴계원 | 34.9|   8  |'97-2001|12,975|   - |    - |   - |   - |12,975

|               |     |      |        |      |     |      |     |     |

| -신갈-안산    | 23.5|   4  |'88-'91 | 1,765|1,287|   478|  478|   - |    -

| -서해안(인천  | 27.6|   6  |'90-'93 | 5,986|  444| 1,870|  470|1,400| 3,672

|   -안산)      |     |      |        |      |     |      |     |     |

| -시흥-안산    | 12.5|   6  |'91-'94 | 1,650|    9|   247|  100|  147| 1,394

| -제2경인      | 15.5|   6  |'90-'94 | 2,700|  145|   399|  299|  100| 2,156

|  <확장>       | 37.9|      |        | 2,045|  612|   732|  732|   - |   701

| -경인(신월-   | 11.7| 4->8 |'89-'92 |   677|  272|   278|  278|   - |   127

|  부평)        |     |      |        |      |     |      |     |     |

| -경부         |     |      |        |      |     |      |     |     |

|  .양재-수원   | 18.6| 4->8 |'89-'92 |   868|  340|   394|  394|   - |   134

|  .한남-양재   |  7.6|4->6.8|'91-'93 |   500|   - |    60|   60|   - |   440

|               |     |      |        |      |     |      |     |     |

|2.신도시연결도 | 84.4|      |        | 8,163|  795| 3,836|3,672|  164| 3,532

1| -서오능-일산  | 11.2|   6  |'90-'92 |   334|    2|   200|  200|   - |   132

2| -수색-일산    | 11.5|   8  |'90-'92 |   589|    2|   353|  353|   - |   234

3| -성산대교-일산| 18.4|   8  |'90-'92 | 1,177|  165|   700|  700|   - |   312

4| -군포-안양    |  9.1| 4->10|'89-'92 | 2,119|  599|   593|  429|  164|   927

5| -군포-인덕원  |  3.2| 4->10|'90-'92 |   712|    3|   659|  569|   - |    50

6| -양재-분당    | 13.2|   6  |'90-'92 |   505|    9|   298|  298|   - |   198

7| -포이-내곡    |  2.5|   4  |'91-'94 |   222|   - |     4|    4|   - |   218

8| -화양동-잔지  |  8.6|   6  |'90-'94 | 1,744|   11|   587|  587|   - | 1,146

9| -장지-분당    |  6.7|   6  |'90-'92 |   761|    4|   442|  442|   - |   315

|               |     |      |        |      |     |      |     |     |

|3.일반도로건설 |157.4|      |        | 5,010|  920| 1,417|  703|  714| 2,673

10| -행주-벽제    | 12.5| 2->4 |'89-'93 |   479|  110|   108|  108|   - |   261

11| -행주대교     |  1.4|   3  |'87-'92 |   162|  104|    20|   20|   - |    38

12| -양촌-개화    | 17.0| 2->4 |'89-'92 |   430|   53|   148|   87|   61|   229

13| -부천-개화    | 11.6| 2->4 |'89-'92 |   346|   31|   203|   56|  147|   112

14| -서울-인천    | 11.2| 2->4 |'89-'92 |   438|  134|    82|   40|   42|   222

15| -반월-군포    |  6.5| 2->4 |'89-'92 |    68|   25|    43|   11|   32|    -

16| -수원-군포    |  7.1| 4->8 |'89-'92 |   596|   47|   443|   87|  356|   106

17| -수원-광주    | 26.2|   2  |'87-'91 |   225|  164|    61|   61|   - |    -

18| -이천-광주    | 25.8| 2->4 |'89-'93 |   347|   91|    75|   75|   - |   181

19| -성남-광주    | 13.1| 2->4 |'89-'92 |   216|   22|    97|   21|   76|    97

20| -하남우회     |  4.5|   4  |'89-'94 |   379|   87|    40|   40|   - |   252

21| -도농-양평    | 20.5| 2->4 |'89-'94 | 1,324|   52|    97|   97|   - | 1,175

|               |     |      |        |      |     |      |     |     |

|4.지방도로건설 | 37.9|      |        | 2,093|  898|   629|  539|   90|   566

22| -쓰레기수송로 | 11.2|   4  |'90-'92 |   443|  137|   225|  225|   - |    81

23| -광명-논곡    | 10.4| 2->6 |'89-'92 |   280|   56|   130|   40|   90|    94

24| -의왕-과천간  | 10.8|   4  |'90-'92 | 1,042|  478|   199|  199|   - |   365

|  고속도로     |     |      |        |      |     |      |     |     |

25| -과천-양재    |  4.6| 4->8 |'90-'92 |   121|   46|    75|   75|   - |    -

26| -팔당대교     | 935m|   4  |'86-'93 |   207|  181|    - |   - |   - |    26

------------------------------------------------------------------------------