수도권 신국제공항건설 본격 추진

-------------------------------

교통부 신국제공항건설기획단 312-9130

o 2000년대 수도권지역의 항공수요 대비와 동북아지역 중추공항으로 24시

간 운영 가능한 공항건설을 위하여 지난해 11.12일 착공된 수도권 신국제

공항은 현재 혹한기임에도 불구하고 건설공사가 차질없이 진행되고 있다.

o 그동안 부지조성을 위한 남.북측 방조제 축조 및 공항지원시설 부지확보

를 위한 공구별 공사가 순조롭게 진척되어

- (주)광주고속에서 시행중인 1공구 부지조성공사는 삼목도 조막산을 절

토하여 여기서 나오는 토사로 새로운 부지를 조성중에 있으며

- 한일개발(주), 현대건설(주)에서 각기 시행중인 2, 3공구 남.북측 방조

제 공사는 환경영향평가 결과의 이행계획에 따라 건설공사 시행전 매립

공사로 인한 해양오염방지를 위하여 오탁방지막을 설치중에 있고, 오탁

방지막 설치가 끝나면 본격적인 방조제 축조공사가 시행될 것이며 현재

는 방조제 축조에 필요한 석재취득을 위한 석산발파와 절토공사가 활발

히 진행중에 있다.

o 한편 금년도 상반기중에 새로운 추가공사를 발주할 계획으로 현재 설계작

업이 한창 진행중에 있으며 그 공사내역은

- 사업비 1,300억원, 면적 약 100만평 규모의 4공구인 여객청사지역 부지

조성공사, 사업비 850억원, 면적 약 100만평 규모의 5공구인 제1활주로

지역 부지조성공사, 사업비 80억원, 면적 5만평 규모의 현지주민 이주

를 위한 단지조성공사 등이고

- 우리나라에서 처음 건설되는 자정식 2층 현수교인 연육교는 영종도와

북인천을 연결하는 것으로 사업비가 약 3,400억원, 연장 5.1km로서 '93

하반기에 착공된다.

o 그리고 수도권 신공항건설의 기본이 되는 각종 설계를 지난 '90년부터 시

행하여

- 이중 기본설계 및 부지조성 실시설계는 이미 완료되었고

- 연육교, 공항토목시설, 전용고속도로, 항공보안시설 실시설계와 여객터

미널 기본설계는 현재 진행중에 있으며

- '93년도에는 부대건물 기본설계, 여객터미널 실시설계, 국제업무지역

및 배후지원단지 도시설계, 전용철도 노반실시설계를 시행할 예정이다.

o 또한 현지 주민과의 보상문제도 순조롭게 이루어져

- 용지매입은 총매입대상면적 258만평중 32만평을 기히 매입('92년말 계

획대비 99%)하였으며 이외의 토지는 공사진행에 따라 순차적으로 매입

할 계획이고

- 어업권 보상도 '92.11월 완료된 1차 어업권 피해영향조사 용역결과에

따라 '93 상반기부터 보상금을 지급할 예정이다.

o 이와같이 수도권 신국제공항건설은 모든 사업이 계획대로 차질없이 진행

되고있어 '93년도부터는 공사가 본격적으로 추진될 전망이다.

<<수도권 신국제공항건설 추진현황>>

1. 사업개요

o 부지조성 : 540만평(최종년도 1,700만평)

o 활 주 로 : 1본(최종년도 4본)

o 연간 여객처리능력 : 2,700만명(최종년도 1억명)

o 서울-공항간 교통시설 : 도로 54.5km('97 이후 철도 66km 건설)

o 기    간 : '92-'97

o 사 업 비 : 34,165억원('91년 불변가격)

2. 그간 추진상황

o 3개 공구 공사착공 : '92.11.12

- 목적 : 수도권 신국제공항건설 부지조성을 위한 남.북측 방조제 축조

및 본격 공사시행을 위한 공항지원시설 부지확보

- 공구별 공사개요 및 추진사항

(1) 1공구(광주고속)

. 사업내용 : 부지조성 61만평, 가설도로 4.5km

. 공 사 비 : 535억원

. 공사기간 : '92.11-'95.4(30개월)

. 추진사항 : 삼목도 조막산 절토 등 부지정지중

(2) 2공구(한일개발)

. 사업내용 : 남측 방조제 6km, 배수갑문 3연

. 공 사 비 : 540억원

. 공사기간 : '92.11-'96.6(44개월)

. 추진사항 : 해양오염방지를 위한 오탁방지막 설치

신불도 석산발파 등 절토공사중

(3) 3공구(현대건설)

. 사업내용 : 북측 방조제 7km, 배수갑문 5연

. 공 사 비 : 825억원

. 공사기간 : '92.11-'96.10(48개월)

. 추진사항 : 해양오염방지를 위한 오탁방지막 설치

삼목도 석산발파 등 절토공사중

o 각종 설계시행

- 기본설계 완료 : '90.11-'91.12

- 부지조성 실시설계완료 : '91.11-'92.12

- 연육교 실시설계 : '91.12-'93.5

- 공항토목시설 실시설계 : '92.10-'93.11

- 전용고속도로 실시설계 : '92.11-'93.12

- 여객터미널 기본설계 : '92.12-'93.11

- 항공보안시설 실시설계 : '92.12-'94.11

o 용지매입 및 어업권보상

- 용지매입 : 총 258만평중 32만평 매입(286억원)

- 어업권보상 : 어업권보상 약정체결('92.7.24)

1차어업권 피해영향조사 및 보상액 산정 용역시행 완료

('92.11.30)

3. '93 사업추진계획

o 각종 공사착공

- 여객청사지역 부지조성공사(4공구) : '93.6(42개월)

. 부지조성 98만평, 1,280억원

- 제1활주로지역 부지조성공사(5공구) : '93.6(42개월)

. 부지조성 94만평, 878억원

- 이주단지 조성공사 : '93.6(18개월)

. 단지조성 5만평 및 상하수도시설, 80억원

- 연육교(영종도-북인천) 건설공사 : '93 하반기('97말 준공)

. 연장 5.1km인 2층 교량(상부 : 도로 6차선, 하부 : 도로 4차선 및

철도복선)으로 세계최대규모, 3,353억원

o 각종 설계시행

- 부대건물 기본설계

. 설계내용 : 화물터미널 등 각종 부대건물의 세부 평면계획

. 설계기간 : '93.3-'93.12

. 설 계 비 : 37.5억원

. 설계업체 : 국제현상설계 우수업체(신한건축, 불란서 A.D.P 등 3사)

- 여객터미널 실시설계

. 설계내용 : 여객터미널 1단계 시설의 시공을 위한 실시설계

. 설계기간 : '93.12-'94.12

. 설 계 비 : 44억원

. 설계업체 : 국제현상설계 최우수업체

(정림건축, 미국 Fentress 등 6사)

- 국제업무지역 및 배후지원단지 도시설계

. 설계내용 : 국제업무지역 및 배후지원단지의 도시설계

. 설계기간 : '93.3-'93.12

. 설 계 비 : 10억원

- 전용철도 노반실시설계

. 설계내용 : 철도노반 실시설계(약 13km)

. 설계기간 : '93.6-'94.6

. 설 계 비 : 9억원

o 용지매입 및 어업권보상

- 용지매입 : 39만평(369억원)

- 어업권보상 : 1차어업권 피해액 산정 용역결과에 따라 보상금 지급

('93 상반기)

* '93 사업비 : 2,132억원(국고 1,432, 공단 700)