시화호 수질개선 세부추진계획

----------------------------

환경부 수질보전국

I. 추진배경과 기본방침

o 추진배경

- 시화호의 수질개선과 관련하여 정부가 발표한 "시화호 수질개선 종합

대책"의 효율적인 추진을 위해

- 환경기초시설의 확충 등 장기대책과 해수유통을 원활히 하기 위한 배

수갑문 조작방안 등 단기대책 추진을 위한 세부 시행계획을 실천에

옮김으로써 시화호 수질개선을 도모

o 기본방침

- 시화호의 수질개선을 위해 가능한 모든 수단과 방법을 동원하되 장.

단기 대책으로 구분하여 추진

- 단기대책은 조속히 실시하며 장기대책은 관련 지자체 및 전문가 의견

을 광범위하게 수렴하여 추진

- 투자는 한국수자원공사가 사업비 전액을 선투자하고 지자체가 연차적

으로 상화하고 상환액 일부를 국고보조

II. 투자계획

o 기본방향

- '99년까지 총 4,493억원을 투자, 공단 및 주거지역에서 발생되는 오.

폐수의 완벽한 처리, 유입하천의 정비 및 인근 농경지 등의 오염물질

을 차단시키는 등의 대책을 추진

- 이와 같은 대책이 추진되는 동안 담수호의 오염진행을 막을 수 있는

단기적인 수질정화방안도 병행하여 추진

o 연차별 투자계획

(단위 : 억)

=============================================================

계          '96         '97       '98 이후

-------------------------------------------------------------

투자액        3,493        253        1,000        2,240

=============================================================

주) 기타 지방자치단체 투자액 1,000억

III. 단기대책

o 배수갑문 조작관리

- 장기대책이 효과를 가져오기 위해서는 최소한 5년 정도의 시간이 소

요되므로 단기적으로 시화호 수질개선을 위하여 해수의 원활한 소통

을 통한 수질개선이 필요

- 배수갑문 개방에 따른 인근 연안의 오염을 최소화할 수 있는 배수갑

문 조작규정 필요

o '96.8월 28 수질개선을 위한 배수갑문 조작관리방안에 대하여 민간단체

를 포함한 각계 전문가 회의를 개최하여 수질개선을 위한 배수갑문 조

작관리방안 확정

o 산화지 설치

- 시화호로 유입되는 오.폐수를 연못에 일정한 기간동안 체류시켜 생물

학적 처리를 통한 오염물질 제거

- 시설개요

(단위 : mg/리터, 입방미터, 억)

=================================================================

유입수질           방류수질

위치     -----------------  -----------------  시설규모  비용

BOD    T-N    T-P  BOD    T-N    T-P

-----------------------------------------------------------------

시화유수지  34.9   33.3   1.2   17     30    1.1   330,000

화정천      70.9   20.4   1.9   33     20    1.9    26,000    3

안산천      58.6   11.8   1.2   35      7    0.8    21,000

=================================================================

- 추진현황

. 안산천과 시화유수지 산화지는 기 완공

. 화정천 산화지는 홍수기 상류부 침수우려로 공사중지('96.11월말

완공예정)

o 역간접촉산화지 설치

- 자갈 등을 이용하여 미생물 등이 오염물질을 제거하도록 하여 수질개

선 도모

- 시설개요

(단위 : mg/리터, 억, 입방미터)

=================================================================

유입수질        방류수질

위치     ---------------  -------------  공사기간  비용  규모

BOD   T-N   T-P  BOD  T-N  T-P

-----------------------------------------------------------------

반월천하류  25.1  14.4  0.4  7.5  12   0.3  '96.6-12   45  10,260

=================================================================

- 추진현황

. 기본 및 실시설계 :'96.10월말

. 공사시행 : '96.11-'97.2

o 인공습지(수생식물 재배)

- 갈대, 부레옥잠 등을 식재하여 자연적인 정화작용을 이용하여 오염물

질 처리

- 시설개요

(단위 : mg/리터, 입방미터)

===================================================================

유입수질        방류수질

위치        --------------   -------------      시설규모

BOD   T-N  T-P   BOD  T-N  T-P

-------------------------------------------------------------------

반월, 동화, 삼화  15.1  6.7  0.38  3.0  2.7  0.3   수표면적 : 480천

천 합류부 간석기                                   유효수심 : 0.6m

===================================================================

- 추진현황

. 기본계획 수립 : '96.9.20

. 기본 및 실시설계 : '96.10월말

. 공사착수 및 완료 : '96.10.15-'97.3월말

o 시화하수처리장 여유용량 활용

- '96.9월 이후 남게 되는 시화하수처리장의 용량(약 91,000톤/일) 활

용하여 반월공단 우수토구, 신길천, 시화유수지 배출 오.폐수 차집처

리

- 시설개요

(단위 : 세제곱미터/일, mg/리터)

===================================================================

유입수질

위치         기준수량      시설규모         -----------------

BOD    T-N    T-P

-------------------------------------------------------------------

반월공단 우수구     73,400    차집수로 6.7km     98.2   63.7   5.5

신길천              27,400    집수정 2개소       60.7   13.0   1.9

시화유수지          35,000                       34.9   33.3   1.2

-------------------------------------------------------------------

계             135,800        91,000         74.3   45.6   3.7

===================================================================

- 추진현황

. 기본계획 수립 : '96.7.18-8.9

. 실시설계 완료 및 공사착수 : '96.10월말

. 공사완료 :'96.12월말

o 오염이 진행되고 있는 시화호의 수질정화

- 호소내 약품시험 살포

. 실내시험 실시 : '96.7.30-9.15

. 호소내 적용검토 : '96.9월말

- 수중폭기시험장치 설치운영

. 폭기시험장치 규격선정 : '96.8.17

. 폭기시험장치 설치완료 : '96.8.23, 10기

. 수중폭기시험장치 운영, 효과분석 : '96.9.20

- 시험준설 실시

. 시험준설 완료 : '96.7.25-8.5

. 현재 준설성과분석보고서 작성중 : 고려대 환경공학연구소

- Microlepton을 이용한 수질정화

. 소립자간의 약한 상호작용을 일종의 전기자장을 통하여 활성화시킴

으로써 오염물질을 응집.침전하여 수질을 정화

. 현재 진로종합연구소에서 Pilot scale 시험을 추진중

- 기타 전기분해방법 및 Container를 활용한 물리화학 또는 여과처리에

의한 수질정화방법은 현재 타당성 및 처리효과 등에 대하여 검토중

IV. 장기대책

o 하수처리장의 확충

- 안산시 하수처리장 2차 처리시설 및 확장공사(안산시)

. 사업기간 및 비용

.. 1단계 : '93.3-'97.12. 1,091억원 소요

.. 2단계 : '98-'99. 189억원 소요

* '96.9 생활계 179천톤/일 완공

. 사업규모

.. 1단계 : 250,000톤/일(121,000 --> 385,000톤)

.. 2단계 : 52,000톤/일(385,000 --> 437,000톤)

. 추진공정 : 45%

- 시화하수처리장 증설공사(수자원공사)

. 사업기간 및 비용 : '96-'98,600억원 소요

. 사업규모 : 74,000톤/일(176,000 --> 250,000톤)

o 축산폐수처리장 건설

- 반월천, 동화천, 삼화천 유역의 축산폐수, 공장폐수 및 생활오수 등

의 처리

- 시설개요

(단위 : 세제곱미터/일, mg/리터)

=================================================================

시설개요                            기준수질

--------------------------------------------    -----------------

계획처리용량      처리방식          차집관거    BOD    T-N    T-P

-----------------------------------------------------------------

25,000     생물학적 질소, 인     300-600     220    80     30

제거 고도처리 방식    L=45km

=================================================================

- 소요예산

건설비 : 약 410억원(연간 관리비 10억원 포함)

- 추진계획

. 기본 및 실시설계 : '97.2-'97.12

. 1단계 공사 : '98.3-2000

. 화성군 축산폐수처리장 건설계획과의 협조 필요

. 수공에서 직접 시행하고 시화지구개발사업 완료시 지자체가 관리

할 수 있도록 사업비 지원

o 환배수로 설치

- 시화호 유역 6개 지천 및 시화공단내의 수로를 통하여 배출되는 오.

폐수를 차집하여 자연정화후 방류

- 시설개요

. 개수로 : 18km(저폭 6m-12m)

. 수로바닥 : 갈대식생으로 자연정화

. 수로주변 : 녹지대 형성으로 친환경 조성

. 중계펌프장 : 7개소

. 하천유하량 : 최대 2세제곱미터/sec

- 사업기간 및 소요사업비

. 사업기간 : 1998-2001(시화확장단지 건설 병행)

. 소요사업비 : 약 162억원

. 연간관리비 : 약 3.5억원

. 조사설계비 : 약 10억원

- 추진계획

. '98-2001까지 공사 시행

. 시화지구 확장 단지 및 배후주거단지개발사업과 병행하여 단지내

녹지공간 및 휴식시설과 연계하여 환경기초시설 설치

o 오염원 차단용 수중보 설치

- 시화호를 2개로 구분하여 주오염원 및 유입부하량이 큰 지역을 집중

관리

- 시설개요

. 보길이 : 1,300m(수중 : 1,000m, 육상 300m)

. 보높이 : 8.0m

. 설치위치

.. 우안 : 화정천, 안산천 합류부 직하류

.. 좌안 : 화성군 송산면 고정리 지역

- 추진계획

. 기본설계 : '96.8-'96.12

. 실시설계 : '97.2-'97.12

. 1단계 공사 : '98.3-2000

V. 단계별 수질보전대책 추진계획

- 바지선에 전기분해 수처리 시설을 장착, 시화호 바닥에 쌓인 퇴적물

을 물과 함께 끌어 올려 정화된 물은 시화호로 환원하고 처리된 물은

탈수와 건조를 거쳐 복토재로 사용

- 현재 타당성 및 처리효과 등 검토중

o Container를 활용한 물리화학 또는 여과처리

- 이동식 수처리장치인 Container에 물을 통과시켜 물리화학 또는 여과

처리하는 방안

- 현재 타당성 및 처리효과 등에 대한 검토중

o Silt protector 설치를 통하여 구역별 관리

- Silt protector라는 투수성이 낮은 비투수성막을 이용하여 고오염지

역, 정화지역, 정화수 대기지역으로 나누어 관리

- 현재 비용 및 설치효과에 대한 분석검토중

<단기대책>

o 산화지('96.3/4-4/4)

o 배수갑문 운영

- 시험운영('96.3/4-'98.2/4)

- 개방운영('98.3/4-'99.4/4)

o 역간접촉산화지('96.3/4-'97.1/4)

o 인공습지('96.3/4-'97.1/4)

o 시화하수처리장 여유활용('96.3/4-4/4)

o 퇴적저니토 준설

- 시험준설 및 조사('96.3/4-'97.4/4)

- 투기장 건설 및 준설('98.1/4-'99.4/4)

o 약품처리(조사 및 연구 포함 '96.3/4-'98.4/4)

o 호수내 수질개선대책(조사 및 연구 포함 '96.3/4-'98.4/4)

<중장기대책>

o 축산폐수처리장

- 설계('97.1/4-4/4)

- 시공('98.1/4-'99.4/4)

o 차집 자연수로('98.1/4-'99.4/4)

o 오염원 차단용 수중보(기본 및 실시설계 포함 '96.3/4-'99.4/4)