시화호 수질개선사업 추진현황

----------------------------

환경부

<> 기본방향

o 공단폐수 및 생활하수처리시설 완비

o 호소내 유입지천 및 인근지역 오염원 차단

o 오염된 호수내 수질개선

<> 단기대책

o 유입지천에 인공습지 및 산화지를 설치하여 하천자정능력 향상

o 우수관로에 유입되는 미처리 폐수의 차집 처리

o 약품살포, 수중폭기장치 설치, 퇴적오니준설, 배수갑문 조작 등에 의한

수질개선

<> 장기대책

o 안산, 시화, 화성 등 3개소에 하수처리장 신.증설

o 시화호유역에 환배수로 설치하여 미처리 오.폐수 유입 차단

o 하수차집관로 신.증설 및 기존관로 재정비

o 기타

1. 산화지 설치

o 개요

시화호 유입 오.폐수를 연못에 일정기간 체류시켜 자연정화(생물학 처

리)를 통한 수질개선

- 안산천

. 설치면적 : 6,300평

. 체류시간 : 7hr

. 표면폭기 : 6개소(분수식)

. 부레옥잠 : 3,000평

- 시화유수지

. 설치면적 : 100,000평

. 체류시간 : 24hr

. 표면폭기 : 35개소(분수식 5, 수차식 20)

. 부레옥잠 : 2,100평

- 3간 선수로

. 설치면적 : 1,500평

. 체류시간 : 24hr

. 표면폭기 : 5개소(분수식)

. 부레옥잠 : 500평

* 기타설비 : 미생물 접촉여재

* 사업비 : 5억원(추정)

* 화정천(7,800평) 산화지는 '96.11월 설치예정

o 추진현황

- '96.8-10까지 안산천, 시화유수지, 3간 선수로에 산화지공사 완비하

여 정상 운영중

- 부레옥잠은 동정기중 온실에 보관(11월 중순-3월초)

o 기대효과

- COD는 18-23%, T-P는 10-20% 개선효과를 나타냄.

(단위 : mg/리터, %)

=============================================================

시화 3간선 산화지  시화공단 산화지  안산천 산화지

----------------- ---------------- ---------------

COD     총인     COD     총인     COD     총인

-------------------------------------------------------------

유입수       15.6      0.8    16.9      0.5    11.4      1.0

유출수       12.0      0.7    13.5      0.4     9.4      0.9

개선효과       23       11      20       20      18       10

=============================================================

o 향후 계획

- '97.3월중 화정천 산화지 공사완료

- '97년도에 부레옥잠을 재식재하여 운영하고, 표면폭기시설 보강 설치

- 학생 및 국민들의 환경교육 현장 학습장으로 활용 계획

2. 인공습지 설치

o 개요

- 반월, 동화,삼화천, 유역발생 점오염원 및 비점오염원 저감을 위해

갈대 등 수생식물을 식재하여 자연 정화작용을 이용 수질개선 도모

- 반월, 동화, 삼화천 --> 침전지 --> 습지(갈대식재) --> 시화호

=============================================================

계      반월천     동화천   삼화천

-------------------------------------------------------------

유입수량(입방미터/일)     71,600    25,600    41,400    4,600

시설규모(평방미터)       811,794   416,875   306,634   88,285

=============================================================

주) 사업비 : 70억원(추정)

o 추진현황

- 기본설계 실시 : '96.10

* 외국전문가 자문시행

. 자문기관 : '96.9-10

. 자문기관 : 미국 HARZA Eng.CO.

o 기대효과

(단위 : mg/리터, %)

=============================================================

반월천            동화천            삼화천

-------------------------------------------------------------

유입 BOD             50                20                 5

유출 BOD              8                 5                 3

처리효율             80                75                40

=============================================================

o 향후 계획

- 실시설계 : '97.1

- 공사시행 : '97.3-'98

- 조성완료 후에는 야생동물서식지 확보 등 자연생태공원 조성 및 자연

학습장으로 활용하고, 국내 멸종위기의 자생수초 재배지 추가 조성

3. 역간 접촉산화지 설치

o 개요

- 오염된 폐수를 자갈층에 통과시켜 자갈표면에 부착된 미생물에 의해

유기물을 제거하는 처리공법

- 반월천 --> 수중보(Rubber댐) --> 자갈층(폭기장치) 여과 --> 인공습

지 --> 시화호

o 향후 계획

당초 오염이 심한 반월천 하류부에 미생물 접촉여재를 통하여 수질을

개선코자 하였으나 직하류부에 인공습지 건설예정으로 이와 연계 검토

(사업비 : 45억원(추정))

4. 임시 차집수로 설치

o 개요

- 안산하수처리장 생활계열 179천톤/일의 시설이 완료되어 '97.1월 이

후 남게 되는 시화하수처리장의 여유 용량(약 116천톤/일)을 활용하

여 반월공단 우수토구, 신길천, 시화유수지 배출 오.폐수를 차집 처

리

. 시설용랑 : 135,000입방미터/일

. 차집수로 길이 : 11km(관수로 : 7.5km, 개수로 : 3.5km)

. 펌프설치 : 8개소

. 삭감부하량 : 6,792(BOD, kg/일)

. 시화호유입 오수량의 44% 처리

. 사업비 : 50억원(추정)

o 추진 현황

- '96.10월부터 진입도로를 설치하여 관로부설 및 유수지 구간개수로

설치 공사중

o 향후 계획

- '96.12 : 차집수로 공사완료

- '97.1 : 시화하수처리장에 유입 처리

5. 약품살포

o 개요

호소내 과영양상태로 인한 조류발생을 제거하기 위하여 응집제를 투입

침전처리

o 추진 현황

- 실내시험

. 시험약품 : 액체황산알루미늄, 황토, 생석회

. 시험방법 : 혼합투여실험

. 실험기간 : '96.7-8월

- 현장 적용실험(1차)

. 시험포제작 5m(L) x 5m(W) x 7m(H) x 6지

. 시험기간 : '96.9-10월

. 실험결과 : 생석회와 황토 혼합투여로 COD 10%, Ch1-a 50% 개선

o 개선효과

- 현장실험

. 수질현황 : (COD) 5.5-6.5mg/리터, (엽록소 a) 50-60마이크로그램/

리터

. 조류는 약 10마이크로미터 크기의 편모조류가 우점

. 응집제투여 및 폭기후 수질개선 효과(투여후 5일간 평균)

(단위 : %)

===========================================================

COD개선      엽록소(a) 개선      총인개선

-----------------------------------------------------------

Alum                8               30              15

Lime                8               23               0

Lime+황토          12               56               4

Lime+Alum           5                5               3

===========================================================

주) 약품투여는 Lime과 황토의 혼합투여가 가장 효과 큼.

o 향후 계획

- 동절기 2차시험 실시중('96.10-11월)

- '97년 이후 계절별 조류 우점종에 대한 제거효율 검토 예정

6. 수중폭기장치 설치

o 개요

호소저층에 공기를 공급하여 상.하층간 강제순환으로 부영양화 방지(조

류제거 및 심층수 수질개선)

=============================================================

설치내역                   비고

-------------------------------------------------------------

설치수량                 100기             방조제 배수갑문옆

(수심 12m)

형식                다공산소전이법

영향영역

. 수표면           625천평방미터          호수면적의 1/90

. 수체적           6,370천입방미터        총저수량의 1/52

유효저수량의 1/28

=============================================================

o 추진 현황

- '96.8-9 : 10기 시험설치 운영(배수갑문 주변)

- '96.9-11 : 90기를 추가 설치하여 현재 100기 24시간 가동중

o 기대효과

- 7기 집중폭기

. 2일 후 성층파괴 : 수온 및 용존산소가 전층에서 일정하게 분포

. 용존산소 : 표층은 포화농도로 감소, 심층은 증가

. 수질개선 효과 : COD 약 15%, 엽록소a(조류) 10-20% 감소

- 약품 시험포내 수중폭기(폭기후 5일간 평균)

. 수질개선 효과 : COD 13%, 엽록소a(조류) 57% 감소

- 1기 단독폭기

. 폭기 후 중.하층 용존산소 증가

. 심층무산소층 : 폭기전 8m 이하 --> 폭기 1일 후 9m --> 7일 후 10m

이하로 감소

. 수표면 확산 영향권역은 반경 약 75m

- 심층수 수질개선

. 폭기전 심한 악취 발생(메탄 및 황화수소) --> 폭기 2-5일 후 악취

소멸

7. 퇴적저니토 준설

o 개요

시화 방조제건설 이후 시화호내 오염이 심한 저니토 준설로 수질환경

개선

o 추진 현황

- 시험준설 실시

. 준설위치 : 반월공단 토구부

. 준설기간 : '96.7.27-8.5

. 준설토 처리방식 : 약품침전처리

. 준설물량 : 400입방미터

* 시험준설 성분분석 실시중

o 향후 계획

- 조사 : 준설심도, 성분, 대상준설량 및 수질개선 효과 등 각종 조사

는 '96년도에 착수, '97년 상반기 완료

- 준설토 매립장건설

. 장차 개발예정인 시화확장단지 구역내 건설

. 인공습지 건설로 발생되는 사토(약 30-50만입방미터 추정) 처리 계

획과 연계

. '97년 매립장건설 완료

- 준설 : 조사 및 매립장건설 완료 후 '98년까지 준설완료(공단앞 약

60-100만입방미터의 퇴적토 준설)

8. 배수갑문 조작관리

o 개요

장기대책의 효과를 가져오기 위해서는 최소한 5년 정도의 시간이 소요

되므로 단기적으로 시화호 수질개선을 위하여 해수의 원활한 소통을 통

한 수질개선

o 추진 현황

- 시화호 수질관리대책 수립을 위하여 한국물학술단체연합회에 용역의

뢰중이며, 이와 연계하여 시화호 수질개선 차원의 배수갑문 조작관리

규정 마련을 위해 해양관련 전문연구기관과 용역 추진중에 있음.

- 시화호 수질개선대책 수립 연구용역

. 용역 수행기관 : 한국물학술단체연합회, 농어촌진흥공사

. 용역기간 : '96.6.20-'98.6.10

. 과업내용 : 주요 수계별 수문, 유입부하량, 수질조사, 시화호 수질

개선차원 배수갑문조작관리규정 작성(시화호 수질관리

대책 수립) 등

. 용역비 : 744백만원

* '96.7.19 : 환경사범대책위원회에서 시화호 방조제 배수갑문조작

관리규정 심의 확정시 수질개선조작관리방안에 대하

여는 용역실시 후 재확정키로 함.

o 향후 추진계획

- 용역사업 과제중 시화호 수질개선차원의 배수갑문조작관리규정 마련

을 위한 시험개방계획(안)이 확정되면

. '96.12 : 시험개방 및 현장조사

* 시화호 외해 연안환경영향조사 용역(계획)

.. 용역수행기관 : 해양관련 전문기관

.. 용역기간 : '96.12-'98.7

. '97.2 : 배수갑문조작관리규정 초안 작성

. '97.2-'97.6 : 배수갑문조작관리규정(초안)에 따른 시험운영

. '97.6 : 배수갑문조작관리규정(1차 수정안) 제출

. '98.6 : 배수갑문조작관리규정(최종안) 제출

9. 하수처리장 신.증설

o 개요

안산, 시화, 화성 등에 3개소의 하수처리장을 신.증설하여 처리능력을

2001년까지 297천톤/일에서 789천톤/일로 제고

o 추진 현황

<안산하수처리장>

- 안산시 주관으로 2001년까지 2단계에 걸쳐 121천톤/일(1차 처리)에

서 534천톤/일(2차 처리)으로 증설

===========================================================

계    기존용량    1단계      2단계

-----------------------------------------------------------

계(천톤/일)            534     121         264         149

소요비용(억원)       1,884       -       1,092         792

사업기간                               '93-'97    '97-2001

===========================================================

주) 58천톤/일의 증설 및 2차 처리공사를 9월말 완공하여 무부

하시험운전 및 보완공사중('97.1월중 정상가동 예정)

<시화하수처리장>

- 한국수자원공사 주관으로 '98년까지 176천톤/일에서 250천톤/일으

로 증설

===========================================================

계        기존용량        증설량

-----------------------------------------------------------

계(천톤/일)               250           176             74

소요비용(억원)            600             -            600

===========================================================

주) '96.11월 현재 실시 설계중

<화성군 하수처리장>

- 화성군 주관으로 '99년까지 420억을 투자하여 5천톤/일 규모의 하

수처리장을 신설

- 화성군으로부터 '97.2월까지 시화호 유역 수질개선대책을 제출받아

세부적인 계획 확정

10. 하수차집관로 보완

o 개요

안산시 및 반월공단내 하수관로 1,114km와 시화공단내 하수관로 405km

에 대하여 전면적인 오접조사 및 보수를 실시

- 안산시(반월공단)

. 조사대상 : 반월공단 및 안산시내 하수관로 1,114km

. 조사기간 : '96.9-12

- 시화공단

. 조사대상 : 시화공단내 하수관로 405km

. 조사기간 : '95.10-'96.12

* 조사비용 : 5억(추정)

o 추진현황 및 계획

<안산지구>

- 추진 현황

. 하수관로 1,114km 육안 조사실시(안산시)

.. 조사시기 : '92-'96

.. 조사결과 : 976개소 확인(시공불량 604, 관리불량 372)

* 시공불량부문 보수완료

. CCTV 조사(안산시)

.. 조사시기 : '91.7-'91.10

.. 조사대상 : 978km중 16.8km(1.7%)

.. 조사결과 : 6,720개 불량 개소 확인(시공불량 411, 관리불량

1,200)

* 시공불량부문 보수완료

- 향후 계획

. '96.9-12 : 안산하수관로 조사(수공)

. '96.10 이후 : 공공하수도 오접 보수

.. 건축오접은 안산시에서 보수

.. 시공오접은 수공에서 보수

<시화지구>

- 추진현황

. 하수관로 305km 조사실시(CCTV)

.. 수공 : 247km('95.10-'96.4)

.. 시흥시 : 58km('95.7-'95.11)

.. 조사결과 : 6,979개 불량개소 확인(시공불량 4,301, 관리불량

2,368, 오접합 310)

. 조치사항 : '96.11 현재 3,946개소(56.5%) 보수완료

- 향후 계획

. 불량상태가 경미한 정도를 제외한 나머지 연내 보수완료 예정

. 전체 보수는 '97.1/4분기중 완료 예정

11. 하수차집관로 증설

o 개요

안산시 관내 안산동, 반월동, 화정동 등에 대한 하수관로 증설

- 안산동('97.7-'98.12)

. 시설개요

.. 오수관거 : 10.81km

. 사업비 : 3,691백만원

- 반월동('97.1-'98.6)

. 시설개요

.. 오수관거 : 7.0km

.. 중계펌프장 : 1개소

. 사업비 : 7,677백만원(펌프장 공사비 1,598 포함)

- 화정동('97.8-'98.5)

. 시설개요

.. 오수관거 : 3.2km

. 사업비 : 986백만원

o 향후 추진계획

- 안산시 주관(자체사업)으로 '97년도부터 착공하여 '98년도 완공 예정

12. 환배수로 설치

o 개요

- 시화호 유역 6개 지천 및 시화공단내의 수로를 통하여 배출되는 오.

폐수를 차집하여 자연 정화후 방류

. 개수로 : 18km(저폭 6m-12m)

. 수로바닥 : 갈대식생으로 자연정화

. 수로주변 : 녹지대 형성으로 친환경조성

. 중계펌프장 : 7개소

. 하천 유하량 : 최대 2입방미터/sec

o 향후 계획

- 공단확장, 배후 주거지역건설 등 추가 개발사업의 진행상황과 병행하

여 추진