서울(강동역)-하남간 경량전철건설사업의 사업계획서 제출기한 변경

---------------------------------------------------------------

건설교통부 육상교통국 도시철도과 504-9149

o 건설교통부는 '96.7.12 서울(강동역)-하남시간 경량전철건설 민자유치시

설사업의 사업계획서 제출기한을 '96.7.31에서 '96.10.31로 변경하는 내

용을 고시하였다.

o 민간사업자의 사업계획서 제출기한을 연장한 이유는 '96.4.10 서울시(강

동구)에서 당초계획인 하남시와 강동역간 연결노선을 하남시와 강동구 상

일역간을 연결하는 노선으로 변경할 것을 요구하였으나 서울시(강동구)와

하남시간에 이에 관한 협의가 완료되지 못했기 때문이다.

o 서울시(강동구)는 강동역 연계는 교통체증 및 주민생활권 침해우려로 바

람직하지 않으므로 건설비 절감, 교통체증 해소차원에서 상일역연계가 적

합하다고 이견을 제시하였으며,

o 이에 대해 하남시는 상일역 연계는 수요감소 및 이용불편 등으로 타당성

이 결여되어 있는 점을 감안할 때 이를 수용하기 곤란하다는 입장을 표명

해왔다.

o 현재 서울시(강동구)-하남시간 경량전철건설사업의 기본설계에 관한 협의

가 진행중인 점을 감안하고, 추후 도시계획시설 결정, 건축허가 등 구체

적인 행정절차 이행이 원만히 진행될 수 있도록 관계 지방자치단체간의

완전한 협의시한을 확보하기 위하여 사업계획서 제출시한을 3개월 연장한

것이다.