축산물수입개방에 대비 축산물종합처리장 건설 앞당기기로

------------------------------------------------------

농림부 축산물유통과 504-9436

o 정부는 내년 7월부터 돼지고기, 닭고기 수입이 자유화됨에 따라 국내산

육류의 냉장육유통체계(Cold Chain System)를 조기 구축해 나가기 위해

축산물종합처리장 건설을 앞당기기로 하였음.

o 농림부에서 추진하고 있는 축산물종합처리장건설 지원사업은

- 김제육가공공장, 한냉중부공장과 같은 현대적인 시설을 갖춘 축산물종

합처리장을 2000년까지 10개소를 건설하여 이를 중심으로

. 전방으로는 생산농가와 계열화하고

. 후방으로는 냉장설비를 갖춘 판매업소들과 연계, 브랜드육으로 유통

시킴으로서 위생적인 쇠고기(돼지고기)를 최소의 유통비용으로 판매

토록 하여 육류유통구조를 냉장육.브랜드육 유통구조로 전환하는 지

원사업임.

o 그동안 축산물종합처리장건설 지원사업은 5개소가 선정되어 현재 건설중

에 있으며, 내년 연말까지 완공.가공될 예정이며,

- 나머지 5개소에 대해서는 당초 '98년 선정계획을 1년 앞당겨 내년 2월

중에 선정키로 하였으며,

- 지금까지 대규모시설(1일 처리능력 : 소 100두, 돼지 1,500-2,000두)만

지원하여 오던 것을 이번에는 대규모 시설의 절반정도 규모인 중규모시

설(1일 처리능력 : 소 50두, 돼지 750-1,000두)도 포함하여 지원토록

하고, 시설이 특정지역에 편중되지 않도록 지역여건을 감안하여 1개 시.

도에 1개소씩 선정해 나가기로 함.

- 또한 설치기간이 2-3년정도 소요되는 점을 감안하여 시설지원금액도 현

실화시켜 지원을 늘리기로 하였음.

. 대규모 시설 표준사업비 : (종전) 12,671백만원(융자 9,519)

--> (인상) 15,332백만원(융자 12,091)

o 동 사업에 대해서는 생산자단체, 농.축산물유통업체, 축산물판매점단체,

돼지고기 품질개선단지.수출업체, 신규.기존 도축업체들이 컨소시움을 구

성하여 참여할 수 있으며,

- 사업계획서 신청은 관할 시.도에 '96.12월말까지 제출하여야 함.

- 신청접수된 사업계획서는 용역기관에 의뢰하여 평가를 거친후 '97.2월

에 최종선정발표됨.

<<축산물종합처리장 사업개요>>

1. 목적

o 축산물종합처리장 중심으로 생산판매의 계열화 유통체계를 확립하여 육

류유통을 지육.냉동육 유통에서 부분육.냉장육.브랜드육 유통체계로 전

환

<축산물종합처리장 중심의 생산.유통 모델>

=================================================================

+----------+          +-----------+          +------+   +------+

|전.기업농 |(계약사육)|축산물종합 |(고유상표)| 자체 |   |      |

| 소.돼지  |--------->|  처리장   |--------->| 판매 |-->|소비자|

|사육협업체|(기술지도)|(도축.가공)|(부분육.  | 조직 |   |      |

+----------+<---------+-----------+ 냉장육)  +------+   +------+

(축협.유통업체)         (직영점.

체인점)

=================================================================

2. 축산물종합처리장 건설 지원계획

o 2000년까지 축산물종합처리장 10개소 건설하여 한우고기.돼지고기 유통

량의 30-40% 공급

- '94-'95 : 대규모 5개소 기 선정 지원중

- '97 : 대규모 5개소 또는 중규모 10개소 추가건설

. 선정 종합처리장 개소수를 대규모만 선정시는 5개소, 중규모만 선

정시는 10개소, 그리고 대규모와 중규모를 함께 선정시는 대규모 1

개소에 중규모 2개소가 대체될 수 있도록 함.

o 축산물종합처리장의 시설규모

- 대규모시설 : 1일 소 100두, 돼지 1,500-2,000두 도축 및 가공

- 중규모시설 : 1일 소 50두, 돼지 750-1,000두 도축 및 가공

o 표준사업비

- 대규모시설 : 총 15,332백만원(융자 12,091백만원, 자담 3,241백만원)

- 중규모시설 : 총 8,000백만원(융자 6,320백만원, 자담 1,680백만원)

* 지원조건 : 연리 5%(생산자단체 3%), 5년거치 10년 상환

o 지원기준 : 부지구입비를 제외한 도축시설, 육가공시설, 오폐수처리 시

설비, 기타 부대시설에 대하여 축산발전기금 지원

- 도축장 --> 융자 80%, 자담 20%

- 오.폐수시설 : 융자 100%

- 육가공시설 --> 융자 70%, 자담 30%

3. 세부추진일정

o 사업계획서 신청접수마감(시.도) : '96.12월말

o 사업계획서 신청접수마감(농림부) : '97.1.15

o 대상자 선정 용역의뢰 : '97.1.16-2.15

o 사업대상자 선정발표(자금지원 시작) : '97.2.16-2.28

4. 대상자 선정기준

o 시.도에서 추천된 사업대상자를 전문연구기관에 평가용역의뢰하여 각

시.도별로 최고득점자 순으로 지원대상자로 선정

- 1개 시.도 대형 1개소 선정을 원칙으로 하며, 대형신청이 없고 중형

시설 신청이 있을 경우는 중형시설 선정

- 신청대상자를 일괄 평가하여 신청지역별 85점 이상을 득한 업체중 최

고 득점자를 사업대상자로 선정하며, 대형시설 1개소에 중형시설 2개

소 비율로 선정

<축산물종합처리장 건설사업 지원계획>

(단위 : 백만원)

=================================================================

자금지원(축발기금)

업체명      총사업비   계     ------------------------------

'95     '96    '97(P) '98-'99

-----------------------------------------------------------------

'94('94-'97)      45,996   36,273  14,279   2,856  19,138       -

안성축산(경기도  15,332   12,091   4,760     952   6,379       -

안성군)

서경양돈(경기도  15,332   12,091   4,759     952   6,380       -

포천)

동아축산(경북    15,332   12,091   4,760     952   6,379       -

군위군)

'95('95-'98)      25,093   20,282       -   9,489   3,237   7,556

북원농산(경기도  15,332   12,091       -   5,711   1,914   4,466

남양주)

부천산업(전북     9,761    8,191                   3,778   3,090

익산시)

'97('97-'99)      76,660   60,455       -       -   2,613  57,842

대규모 5개 업    76,660   60,455       -       -   2,613  57,842

체기준

-----------------------------------------------------------------

합계         147,749  117,010  14,279  12,345  24,988  65,398

=================================================================