여수공항확장 기본계획 수립.고시

-------------------------------

건설교통부 항공국 공항개발과 504-9186

o 건설교통부에서는 급격히 발전하고 있는 여천, 여수, 순천 및 광양권의

배후공항으로서 2000년대 항공수요에 대비(중형항공기의 취항이 가능하도

록) 여수공항을 개발하기 위하여, 2010년을 목표로 한 여수공항확장 기본

계획을 수립하고, 이를 고시하였다.

o 여수공항확장사업의 주요내용은

- 1,500x30미터의 활주로를 2,100x45미터로 신설하고, 현재 1,500평방미

터인 여객터미널을 9,364평방미터로 신축하며, 계류장을 8,870평방미터

에서 30,000평방미터로 확충하고 주차장을 5,500평방미터에서 17,400평

방미터로 확축하는 등 각종 공항시설을 2000년까지 대폭 확장하는 계획

이다.

- 이와 같은 여수공항확장사업은 동 기본계획에 따라 연내 실시설계 및

용지매수에 착수하여 내년말까지 실시설계를 완료한 후, 98년 착공하여

2000년에 완공할 계획이다.

o 이 확장사업이 완료되면 여객처리능력은 연간 43만명에서 240만명으로 5

배 이상 증가하게 되며, 계류장도 현재 F100급의 소형항공기 2대가 계류

할 수 있었으나, 주차장시설도 140대 주차능력이 370대로 늘어나는 등 공

항시설이 대폭 확충되어 편리한 이용과 함께 항공기 안전운항도 대폭 향

상되게 된다.

<참고> 여수공항확장 기본계획

1. 추진경위

o '94.4.19 : 전국공항개발 중장기기본계획 수립.고시

o '95.4-.'96.3 : 여수공항확장 기본조사설계 시행

o '95.4-.'96.5 : 환경영향평가설명회 및 중항건설기술 심의

o '95.4-.'96.9 : 관계기관 협의

2. 기본계획

o 기본방향

- 여수.여천.순천 및 광양권의 배후공항으로서 2000년대 항공수요에 대

비하여 중형항공기의 취항이 가능토록 공항을 개발

o 사업규모

- 부지면적(천제곱미터)

. 1단계 : 1,255

. 현시설 : 383

- 활주로(미터)

. 1단계 : 2,100x45

. 현시설 : 1,550x30

- 계류장(평방미터)

. 1단계 : 30,000(A300급 3대)

. 현시설 : 8,870(F100급 2대)

- 여객터미널(평방미터)

. 1단계 : 9,364(연 240만명)

. 현시설 : 1,500(연 43만명)

- 주차장(평방미터)

. 1단계 : 17,400(370대)

. 현시설 : 5,500(140대)

o 사업기간 : '95-2000

3. 향후 추진계획

o 실시설계 : '96-'97

o 용지매입 및 지장물 보상 : '96-'98

o 확장공사 : '98-2000(2001년 운영)