수도권매립지에 종합환경연구단지 조성

------------------------------------

환경부 기술정책과 504-9241

환경부는 선진국 수준의 환경관련 연구개발 및 인력양성을 위한 기반조성을

목적으로 종합환경연구단지를 조성키로 하고, 3월 19일 강현욱 환경부장관

과 이긍규 국회환경노동위원회 위원장, 최기선 인천시장과 지역주민 등 관

계인사가 참여한 가운데 기공식을 가졌다.

이번에 기공식을 가진 종합환경연구단지는 수도권 쓰레기 매립지내 14만평

의 부지에 국립환경연구원, 환경공무원교육원, 환경관리공단, 한국자원재생

공사 등 4개 기관이 오는 2001년까지 입주할 계획인데

이 단지에 건축되는 건물에는 한번 사용한 수돗물을 전량 재이용할 수 있는

중수도시스템과 Power Plant를 설치하는 등 부족한 수자원과 에너지의 절약

및 재이용, 하천의 오염저감을 위한 시범적인 시설로서 운용할 계획이다.

이 지역이 쓰레기 매립으로 다른 지역에 비해 환경이 열악하다는 점에 비추

어 볼 때 환경관련 기관의 이 지역 이전은 지역발전 및 환경문제 해결과 관

련하여 바람직한 시도로 그 성과가 기대된다.

또한, 환경부는 이번에 I단계 사업에 이어 앞으로 인접한 잔여지 10만평에

II단계 사업을 추진 한국환경기술개발원, 환경산업지원센타 및 해외환경협

력센타 등을 입주시킬 계획인데, 이러한 시설들의 입주가 끝나는 2005년경

에는 명실상부한 환경관련 연구개발, 인력양성, 정보교류.지원 및 환경산업

육성을 위한 종합환경메카로서 자리잡게 될 것으로 기대된다.

<참고1> 종합환경연구단지조성 추진현황

o 목적 : 환경기술개발 및 정책연구, 정보관리, 전문인력 양성 등 유관기능

을 종합적.체계적으로 수행할 수 있는 국제적 수준의 종합환경연

구단지를 조성

-  21세기 환경선진국으로서 국내.외 환경문제에 효율적으로 대처

1. 사업개요(I단계)

o 위치 : 수도권매립지 제2-1공구내 14만평(인천광역시 서구 경서동)

* 수도권매립지에 환경관련기관을 유치함으로써 환경피해 우려 불식 및

주민이해를 바탕으로 NIMBY현상 해소에 기여

o 사업기간 : '92년-2001년

o 유치기관 및 시설규모

(단위 : 평, 백만원)

=================================================================

건축연면적    사업비         비고

-----------------------------------------------------------------

계                    19,000      74,515

-----------------------------------------------------------------

부지조성사업                            23,861

국립환경연구원              10,000      27,598      2000년 입주

환경공무원교육원             6,000      15,987      2000년 입주

환경관리공단                 1,600       4,033      2001년 입주

한국자원재생공사             1,400       3,036      2001년 입주

=================================================================

2. 추진경위

o '90.11-'91.1 신규공공투자사업 사전조사 실시

o '91.2 제7차 경제사회발전 5개년계획에 반영

o '92.12 타당성 조사 및 기본계획 수립

o '92.12 대통령 공약사업으로 선정

o '93.12 부지조성 1차공사 착공

o '94.11 수도권정비위원회 심의완료

o '96.4 부지조성 2차공사 착공

o '96.9 도시계획 용도지역 변경 및 공유수면매립목적 변경

o '96.11 연구원.교육원 건축협의(허가) 완료

o '97.2 국립환경연구원청사 신축공사 착공

3. 추진현황

o 부지조성공사

- '94.12 : 부지조성 기본 및 실시설계 완료

- '97.3 현재 : 부지조성공사 공정률 63%('98.7 완료 예정)

o 국립환경연구원청사 건축공사

- '96.12 : 건축공사 계약 완료

- '97.2 : 건축공사 착공

* 공사기간 : 30개월('96.12-'99.12)

4. 향후 추진계획

o 환경공무원교육원 건축공사 추가 발주 : '97년 상반기

* 총사업비 협의결과에 따라 조기발주 추진

o 환경관리공단, 자원재생공사 건축공사(연면적 : 3,000평)

- '98.1-'98.12 : 건축 실시설계

- '99.3-2000.12 : 건축공사 추진

* 관리공단.재생공사는 법인 자체사업으로 추진

o II단계 사업 추진

- I단계 사업과 연계하여 잔여지 10만평에 대한 II단계 조성계획을 '98

년중 수도권정비위원회에 상정 추진

* 한국환경기술개발원, 재활용종합센타, 환경교육홍보관, 종합환경

Market, 해외환경협력센타 등 시설입주계획

<참고2> "종합환경연구단지 건축공사" 기공식 행사계획

o 행사 개요

- 일시 : '97.3.19(수) 11:00

- 장소 : 인천광역시 수도권매립지 2-1공구내 종합환경연구단지 부지내

- 주최 : 환경부

* 시공사 : LG엔지니어링(주), (주)해강, 감리사 : (주)진로엔지니어링

- 행사일정(11:00-11:30)

. 개식선언 : 사회자

. 국민의례 : 사회자

. 종합환경연구단지조성 추진경과보고 : 기술정책과장

. 식사 : 장관

. 축사 : 국회노동환경위원장

. 시삽(항타기 점화식) : 참석자

* 다과회(현장사무실) : 11:30-12:00

- 참석 및 초청인사

. 환경부 : 장관, 실.국장

. 입법부 : 국회환경노동위원장, 국회의원 등

. 산하단체장 : 연구원장, 교육원장, 관리공단 이사장, 재생공사 이사

장 등

. 지자체 : 인천시장, 시의회의장, 수도권매립조합장 등

. 시공 및 감리사대표, 출입기자단, 주민대표 등