서해안고속도로 무안-목포간 준공.개통

------------------------------------

- 서해안고속도로 전구간 1년 앞당겨 2001년 완전 개통 -

건설교통부 도로심의관실 도로정책과 504-9071

인천에서 목포간을 연결하는 서해안고속도로중 무안-목포간 23.2km가 8.25

(화) 오후 6시를 기해 준공.개통되었다. 이로써 서해안고속도로는 총연장

353km중 이미 개통된 인천-안중간 70.3km를 포함하여 총 93.5km를이용할 수

있게 되었다.

건교부 관계자는 '90년 12월에 공사를 착수한 이 구간은 10월말 개통할 예

정이었으나, 하계 휴가철 교통편의를 위하여 지난 7월 28일 임시 무료 개방

한 바 있으며, 지역개발촉진과 원활한 교통소통을 위하여 당초보다 약 2개

월 앞당겨 모든 공사를 완료하고, 김대중 대통령을 비롯한 건교부장관, 지

역의원, 지역인사, 도공사장 및 공사관계자가 참석한 가운데 개통식 행사를

거행하고 정식 개통하게 되었다고 전했다. 이에 따라 그간 무료로 이용하였

던 이 구간은 통행료를 징수하게 된다.

이제 서해안고속도로 무안-목포간이 개통됨으로써 이 지역의 개발촉진과 대

불공단 등의 산업물동량 적기 수송은 물론 그동안 국도 1호선을 이용하던

것보다 통행시간이 약 10분 정도(25 --> 15분) 단축되고 연간 약 70억원의

통행비용 절감효과도 기대된다.

한편 이 행사에 참석한 김대중 대통령은 나머지 구간인 당진-서천(103.7km)

과 군산-무안간(114.3km)도 계획보다 1년 앞당겨 오는 2001년 모두 개통하

겠다고 밝혔다.

<참고> 서해안 고속도로 조기 완공계획

<> 사업개요

o 구간 : 인천-안산-당진-서천-군산-무안-목포

o 연장 : 353km(인천-당진 : 6차선, 당진-목포 : 4차선)

o 사업비 : 4조 8,079억원

o 사업기간 : '90.12-2002.12

<> 추진현황

o 우선순위가 높은 구간부터 단계적으로 공사를 시행하여, 인천-안중간

71km는 '96.12 개통.운영중

o 2002.12 전 구간 개통을 목표로, '98.7월말 전체 공정은 47%

- '98 개통 : 무안-목포(23km), 서천-군산(23km)

- 2000 개통 : 안중-당진(19km, 서해대교 포함)

- 2002 개통 : 당진-서천(104km), 군산-무안(114km)

<> 조기개통 계획

o 서해안지역의 개발촉진을 위하여, 계획보다 12개월 앞당겨 2001.12까지

전 구간 동시 개통 추진

- 안중-당진 : 계획대로 2000.12 완공

- 당진-서천 : 2002.12 --> 2001.12(1년 단축)

- 군산-무안 : 2002.12 --> 2001.12(1년 단축)