부산 "감천항수산물유통단지"를

유통단지개발촉진법상 "유통단지"로 인정

--------------------------------------

건설교통부 물류심의관실 물류시설과 504-9083

o 건설교통부는 '98.12.15 부산광역시 서구 암남동 감천항만내에서 원양어

업개발(주)이 개발중인 61천평 규모의 "감천항수산물유통단지"를 해양수

산부의 요청에 따라 유통단지개발촉진법 부칙의 경과조치규정에 의하여

관계부처 협의 및 유통단지심의위원회의 심의를 거쳐 "유통단지"로 인정

고시하였다.

o "감천항수산물유통단지는 수협중앙회 및 원양어업종사업체 등 13개 주주

사로 설립된 원양어업개발(주)가 해안을 매립하여 동북아시아의 원양수산

물물류중심기지를 건설하기 위해 공유수면매립공사실시계획인가 및 도시

계획사업실시계획인가 등을 받아 '91.11월부터 공사중에 있으며, 동 단지

에는 2000.12월까지 우리나라 최초의 원양어업전용부두, 최신식 냉동 냉

장창고 14개동, 수산물물류센터 및 지원시설 등을 설치하게 된다.

- 1단계 : 원양어업전용부두 축조 및 부지조성공사('91.11-'99.6)

* 완공단계임.

- 2단계 : 유통시설(냉동 냉장창고, 수산물물류센터) 건축('95-2000.12)

o 감천항수산물유통단지가 완공되면 원양어선의 입.출어와 수산물하역의 편

의를 도모하고 수산물의 보관 분류 포장 가공 통관기능 등을 통합.구축함

으로써, 수산물의 안정적인 수급조절과 수출증대를 도모하고, 수산물의

유통구조 개선 및 물류비 절감으로 국가경쟁력을 강화하는데 크게 기여하

게 될 것이다.

<참고> 감천항수산물유통단지 현황

<> 사업목적

o 원양어선의 입.출어 및 수산물 하역의 편의를 도모하고 수산물의 보관.

분류.포장.가공.판매.통관.정보처리 등의 기능을 구축함으로써

o 수산물의 유통구조를 개선하고 물류비를 절감하여 국가경쟁력 향상에

기여

<> 사업개요

o 위치 : 부산광역시 서구 암남동 산100-1 등

o 면적 : 201,920평방미터(61,081평)

o 사업시행자 : 원양어업개발(주)

* 수협.원양업체 등 13개 업체 출자

o 사업 기간 : '91.11.20-2000.12.31

o 사업 내용

(1단계)

- 사업명 : 원양어업전용부두 축조 및 부지조성공사

- 사업내용

. 안벽 및 호안공사 1,458m

. 에프론, 배후도로 3,055m

. 배후단지 조성(51,358평)

- 사업비 : 397억원(자부담)

- 사업기간 : '91.11-'99.6

- 추진상황 : 공사중(공정 99.6%)

(2단계)

- 사업명 : 수산물유통단지 조성(유통시설 건축)

- 사업내용

. 냉동 냉장시설 13개동

. 수산물물류센터  1개동

. 업무복지시설.수질정화시설.전기시설.통신시설

- 사업비 : 3,017억원(보조 230, 융자 1,879, 자부담 908)

- 사업기간 : '95-2000

- 추진상황 : 건축공사중

o 토지이용계획

(단위 : 평방미터, %)

=================================================================

면적                비고

-----------------------------------------------------------------

합계             201,920

(100)

-----------------------------------------------------------------

- 유통시설용지           126,844     - 전체 물류시설에 해당

(63)

. 하역시설(부두시설)     18,525     . 하역시설(항만법)

. 냉동 냉장창고(13개동)  93,648     . 화물보관.처리시설(항만법),

보세창고(관세법)

. 수산물물류센터         14,671     . 수산물물류센터(농안법)

- 지원시설용지            13,318    - 업무복지시설, 전기시설

(7)   - 공해방지시설 (수질정화.

폐기물.소각시설)

- 공공시설용지            61,758    - 진입도로(도시계획도로)

(30)

=================================================================

주) ( )내는 비율

<> 인.허가사항

o 공유수면매립공사실시계획인가('91.11.13, 부산지방해운항만청)

- 목적 : 원양어업전용부두 축조 및 관련부지 조성

- 면적 : 169,778평방미터(51,358평)

- 사업기간 : '91.11-'99.6

o 도시계획사업실시계획인가('92.12.28, 부산직할시)

- 사업종류 : 감천만원양어업전용부두집산도로공사

- 사업규모 : 연장 3,212.6m,  폭 15-24m

- 사업기간 : '93.1-'98.12

o 건축허가(부산광역시 서구청)

- 건축공사 계속 추진('95.12-2000.12)