축산물종합처리장(LPC) 건설 및 운영 활성화대책

---------------------------------------------

농림부 축산물유통과 504-9436

<> 요지

o 표준사업비 인상(17-31%), 생산자단체 보조(20%) 신설, 원료구매자금

(82억원) 지원 및 금리인하, 지육반출 부분허용, 기존 도축장 LPC화 등

o 2001년 수입개방에 대비, 2000년까지 10개소 운영(LPC 유통 점유율 30%)

- 가동중 : 4개소, '99완공 : 3개소, 2000년 완공 : 3개소

<> 농림부는 IMF 사태 이후 경제여건 악화와 물가상승에 따른 사업비 증가,

원료육 및 판매망 확보부진 등으로 건설 및 운영에 차질을 빚어온 LPC의

건설촉진 및 운영활성화를 위한 특별대책을 적극 추진키로 하였음.

o 축산물종합처리장(LPC)은 정부가 2001년 쇠고기 수입개방에 대비하여

한우고기의 품질고급화와 냉장육.부분육 유통을 선도하는 핵심유통시설

로 육성한다는 목표를 가지고 지난 '95년부터 추진하여 왔으나 IMF 사

태 이후 환율 및 물가상승, 경제여건 악화로 사업추진에 어려움을 겪어

왔는바, 한국식품개발연구원 용역결과를 기초로 특단의 대책을 수립하

게 되었음.

<> 이번에 농림부가 발표한 대책의 주요 내용은

o 먼저 사업비의 증가로 건설이 지연되고 있는 LPC의 건설을 촉진키 위해

실제사업비보다 크게 낮은 표준사업비(대규모 : 153억원, 중규모 : 80

억원)을 179억원, 105억원으로 인상함.

- 대규모 : 17%, 중규모 : 31% 인상

o 농림부는 2001년 수입개방시기를 1년반남짓 남겨둔 시점에서 LPC사업의

조기활성화를 위해서는 계열농가 확보 및 기존 판매망 활용이 용이한

생산자단체(축협 등)의 적극적인 참여가 중요하다고 보고 LPC사업에 생

산자단체가 참여하는 경우 해당사업비의 20%를 보조지원키로 하였음.

o 또한 완공된 LPC의 경우는 계열농가 육성 및 브랜드육 판매망 확보 등

전.후방연계기능을 강화하여 가동률 제고 등 운영을 정상화하는 것이

시급하므로

- 금년에 LPC(4개소)에 대한 원료구매자금을 82억원으로 확대지원하고

민간업체의 지원금리를 생산자단체와 같은 수준인 5%로 인하키로 하

였음.

. 원료구매자금 : ('98) 32억원 --> ('99) 82억원

. 지원조건 : (현행) 연리 8% --> (조정) 5%

- 또한, LPC에서 가공된 부분육을 판매하는 냉장 브랜드육 판매점 120

개소에 대한 설치비로 168억원을 지원할 계획임.

- 한국식품개발연구원, 축협중앙회, 민간전문가 등으로 경영컨설팅팀을

구성하여 원료육 확보 및 마켓팅활동 등 LPC의 운영전반에 관한 주기

적인 경영컨설팅을 실시(연 2회)

- 도축장이 없는 지역의 주민불편 해소와 LPC 운영의 조기정상화를 위

해 지방자치단체장(시.도지사)의 건의가 있는 경우 관내용에 한해 도

축물량의 일정량을 지육으로 반출할 수 있도록 허용

- 앞으로 농림부는 기 계획되어 있는 LPC 이외의 신규건설은 지양하고

시설이 우수하고 규모가 큰 도축장을 선정하여 LPC화하여 보완해 나

갈 계획임.

<> 농림부는 이번에 마련한 LPC 활성화대책을 차질없이 추진하여 오는 2000

년까지 10개소 LPC를 건설.운영하므로써

o 한우고기 유통차별화 및 부분육유통체계를 정착시키고

o LPC의 한우고기 유통점유율을 2001년에 30% 수준으로 제고

<참고> LPC 운영 및 건설추진 현황(총 10개소, '99.3월말 현재)

o 운영(3)

- 안성축산(경기 안성)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : 완공('98.4.9)

. 추진상황

.. 계약농가 : 소 1,735개소(18천두), 돼지 1,254개소(70만두)

.. 판매점 : 가맹점 등(62개소)

.. 가동률('99.2) : 소 20%, 돼지 52.8%

- (주)부천(전북 익산)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : 완공('98.8.27)

. 추진상황

.. 계약농가 7개소 : 돼지 14천두(가동률 20%)

.. 판매점 :7개소

.. 롯데햄과 임가공 추진중

- 명신산업(경북 포함)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : '99.5

. 추진상황

.. '99.3.1부터 시험가동중 : 5.1일 개장예정

o 건설중(5)

- 동아축산(경북 군위)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : '99

. 추진상황

.. '98.2월 공사중단('95% 공정)

.. 축협, (주)한우리 등 제3자 매각 추진

- 박달재한우(충북 제천)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : '99.12

. 추진상황

.. 건축공사중 : 전체 공정률 30%

- 하이마트(강원 원주)

. 규모 : 중규모

. 완공(계획)년도 : 2000.3

. 추진상황

.. 부지매입계약체결 : '99.4월 착공예정

- 푸른육원(충남 홍성)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : 2000.9

. 추진상황

.. 부지확보 : 4월중 착공예정

- 삼언물산(구 거평팜랜드)(전남 장성)

. 규모 : 중규모

. 완공(계획)년도 : 2000.9

. 추진상황

.. 부지정리공사 완료

.. 거평팜랜드에서 사업자 변경 : 중규모로 설계변경중

.. 7월중 착공예정

o 기존(2)

- 축협김제 육가공장(전북 김제)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : '95.7

. 추진상황

.. 계약농가(계열농가 포함) : 돼지 400개소(62만두)

.. 가동률 100%

- 한냉중부 육가공장(충북 청원)

. 규모 : 대규모

. 완공(계획)년도 : '96.5

. 추진상황

.. 계약농가 : 돼지 300개소(503천두)

.. 가동률 : 돼지 100%, 소 90%

* 사업취소(2) : 북원농산('98.10), 진승산업('98.12)