인천국제공항 내년도 개항에 문제없이 공사 진행중

-----------------------------------------------

- 2000년 1월말 기준 88.6%-계획대비 98.2% 진척 -

건설교통부 신공항건설기획단 신공항시설과 504-9195

o 내년초 개항 예정인 인천국제공항 건설사업은 2000.1월말 현재 활주로,

여객터미널, 항공등화시설, 항행안전시설 등 주요 시설들이 마무리 단계

에 있으며, 체계적인 품질관리 및 공정관리로 종합 공정률이 88.6%(계획

대비 98.2%)로서 2001년초 개항목표 달성을 위해 차질없이 추진되고 있음.

o 부지조성공사는 99.8%로 거의 완료되었고 비행장시설은 85.6%(계획대비

97.2%)로서 지하구조물 공사를 거의 마치고 현재 활주로 및 유도로, 계류

장의 마지막 포장공사를 진행중에 있음.

o 여객터미널은 87.3%(계획대비 98.7%)가 진척되었으며, 관제탑을 포함한

61동의 부대건물들도 90.6%(계획대비 104.5%)로서 금년 6월까지는 준공될

예정이며

교통센터의 경우 2005년 수요에 맞추어 주차시설 5,000대를 수용하기 위

한 공사를 진행중이며, 2001년초 개항시 필요한 주차시설 3,800대를 수용

하기 위한 목표공정상으로는 계획대비 100.2%가 진척되어 2001년 개항에

는 아무런 차질없이 공사가 진행되고 있으며, 2001년 6월까지는 모두 완

공할 계획임.

o 기계.전기.종합정보시스템.항공보안시설 및 배후지원단지 등 여타 시설도

대부분 80%(계획대비 97%) 이상의 공정률로 정상 추진중임.

o 아울러 민자사업으로 건설되고 있는 신공항고속도로는 92.2%(계획대비

100%)로서 금년 11월말 준공될 예정이며, 화물터미널, 열병합발전소, 급

유시설 등도 72.1%(계획대비 105.1%)의 공정률을 보이고 있고 특히 열병

합발전소는 이미 전력을 생산하여 시운전용으로 공급하기 시작하는 등 정

상 추진중에 있음.

o 이러한 공사진척에 따라 당초 예정대로 금년 6월까지는 대부분의 시설공

사를 마무리하고 금년 하반기에는 본격적으로 각종 시설의 부분 및 종합

시운전에 들어 갈 예정임.

<참고> 인천국제공항 건설 공정현황(2000년 1월말 현재)

(단위 : %)

=================================================================

2000.1월 공정현황

'99년말 실적  ------------------------------

계획     실적    실적/계획

-----------------------------------------------------------------

공항시설                  87.8       90.2     88.6       98.2

보상(용지, 어업)         94.5       97.7     94.5       96.7

설계 및 용역             96.8       97.2     96.9       99.3

부지조성                 99.8       99.9     99.8       99.9

비행장시설               84.9       88.1     85.6       97.2

여객터미널               83.6       88.4     87.3       98.7

부대건물                 87.0       90.0     90.9      104.5

교통센터                 48.8       50.3     50.4      100.2

기계.전기시설            82.9       85.4     83.3       97.5

배후지원단지             85.4       93.2     85.8       92.1

종합정보시스템           71.2       80.1     77.6       96.9

항공보안시설             77.2       80.0     78.9       98.6

공항민자시설              64.6       68.6     72.1      105.1

화물터미널               67.1       66.2     69.9      105.6

기내식시설               36.4       38.6     40.2      104.2

GSE시설                  33.6       33.4     33.7      100.9

항공화물창고             16.5       21.9     22.0      100.5

열병합발전소             94.6       93.1     95.0      102.0

급유시설                 87.4       87.3     91.4      104.7

신공항고속도로            91.7       92.2     92.2        100

=================================================================

주) 공정률 산출 : 시공이 완료된 부분에 투입된 물량을 기준을 산출