군장국가산업단지 장항지구 조기활성화대책 추진

---------------------------------------------

건설교통부 국토정책국 입지계획과 504-9118

<> 주요 내용

o 군장국가산업단지 장항지구는 국토의 균형개발 차원에서 지난 '89년 지

정하였으나 입주수요 부족, 주변 기반시설 부족 등으로 그 동안 착수가

지연되어 왔으나

경기가 꾸준히 호전되고 있고, 2001년 서해안고속도로가 완전 개통되면

장항지구 사업을 활성화할 수 있는 여건이 더욱 성숙될 것으로 전망되

어

o 우리부에서는 작년 12월에 군장국가산업단지 장항지구 활성화대책을 산

업자원부.해양수산부.토지공사와 합의를 통해 마련하여 발표하고 관계

기관별로 소관대책을 추진해 오고 있음.

o 현재까지의 추진상황을 보면

- 군장산업단지 장항지구 개발계획 변경

. 장항지구 조성사업 활성화의 첫 단계인 산업단지 개발계획 변경안

을 확정하여 2000.3.3 고시

<개발계획 변경내용>

.. 인근 어민들의 수로 확보를 위하여 산업단지구역을 일부 축소

조정(490만평 --> 445만평)

.. 토지이용 및 기반시설계획 일부 변경 등

- 산업단지 진입도로사업 실시설계 착수

. 산업단지 진입도로 2개 노선 9.1km에 대해서도 기획예산처에서 3월

초 예비타당성 조사에 착수할 계획으로 있으며 결과가 나오는 즉시

국고지원을 위한 사업실시설계에 착수할 계획임.

* 진입도로(2개 노선) : 추정공사비 1,580억원

.. 단지 중앙진입도로(3.9km) 및 북측진입도로(5.2km)

- 산업단지 지원을 위한 항만계획 수립 착수

. 해양수산부는 산업단지 지원 항만계획 수립을 위해 금년 3월부터

10억의 예산을 들여 실시하는 전국 무역항 항만기본계획 변경용역

에 장항지구 항만계획을 포함하여 실시할 예정임.

- 장항지구 활성화 용역 및 전면호안 실시설계 착수

. 토지공사는 충남도 및 서천군과 공동으로 "장항지구 조기 활성화

방안 마련을 위한 용역"을 3월초까지 민간컨설팅업체와 계약 체결

하여 착수하고

. 이 용역결과 도출된 산업단지 개발방안 등을 토대로 산업단지 전면

의 호안(5.6km)에 대한 사업실시설계를 우선 착수할 예정이며

o 우리부는 관계기관과 긴밀히 협조하여 활성화 대책을 일정대로 마무리

하고 장항지구 조기 착수에 필요한 후속절차를 차질없이 추진하여 지역

균형 발전의 계기가 될 수 있도록 최선을 다해 나갈 계획임.

I. 군장국가산업단지 장항지구 현황

<> 사업개요

o 위치 : 충남 서천군 장항읍 마서면 서측해면 일원

o 면적 : 445만평

o 사업비 : 13,420억원(용지비 2,066, 조성비 11,354)

o 조성원가 : 50만원/평('99.9 추정가격)

o 유치업종 : 기계, 화학, 목재가구, 기타 제조업

<> 추진현황

o '89.8.10 : 산업기지 개발구역 지정고시

o '90.5.12 : 사업시행자 지정(토지공사)

o '94.7.14 : 어업보상 실시

o 2000.3월 현재 : 산업단지 조기 활성화 대책 추진중

II. 산업단지 활성화 대책 추진

<> 산업단지 개발계획 변경(2000.3.3 고시)

o 산업단지 면적을 490만평 --> 445만평(-45만평)으로 조정

o 사업구역 조정에 따른 토지이용 및 기반시설 계획 변경

- 토지이용계획 변경

. 상업지역 : 258 --> 64천평, 녹지지역 : 416 --> 259천평

- 폐기물처리시설, 폐수처리장 등 일부 기반시설 위치변경

<> 장항지구 조기 활성화 방안 모색을 위한 용역 실시

o 주관기관 : 토지공사(충남도, 서천군 비용 각 25% 공동부담)

o 용역내용 : 사업환경 분석, 입주대상 업종 및 기업분석, 기업유치전

략, 정부지원방안 등 도출

o 추진일정

- 2000.1 : 충남도와 토지공사간 협약 체결, 용역발주

- 2000.3 : 제안서 평가 및 계약 체결

- 2000.8-9 : 용역결과 도출 및 준공

<> 산업단지 진입도로 실시설계(건설교통부)

o 산업단지 진입도로(2개 노선, 9.1km)에 대한 실시설계

- 중앙진입로(3.9km) : 마서면 덕암-옥남간, 추정공사비 780억

- 북측진입로(5.2km) : 마서면 계동-남전간, 추정공사비 800억

o 기획예산처에서 예비타당성 조사대상사업에 포함하여 3월초 타당성조

사 실시 예정

* 500억 이상 신규사업은 반드시 예비타당성 조사를 거쳐야 함.

<> 산업단지 전면호안 실시설계(토지공사)

o 산업단지 전면호안(5.6km)에 대한 실시설계

- 소요공사비 : 860억

o 추진일정 : "장항지구 조기 활성화 방안 모색을 위한 용역" 결과를

토대로 사업 실시설계 착수

<> 산업단지 항만계획 수립(해양수산부)

o 산업단지 개발계획 변경에 따른 항만계획 수립을 위하여 항만기본계

획 변경용역 추진

<용역내용>

- 용역비 : 10억원

- 용역기간 : 2000.3-2001.5

- 추진내용

. 21세기 항만개발방향 설정

. 2011년까지의 전국 항만기본계획 수립

. 장항지구 개발계획 변경내용을 감안한 군장항만기본계획 변경 등

<> 입주수요 확보방안 추진

o 산업단지 조성사업이 가시화되는 시기에

- 타당성 조사 및 관계부처협의를 거쳐 군장국가산업단지 장항지구

일부를 자유무역지역으로 지정하는 방안을 적극 추진(산업자원부)

- 산업단지 일부를 "영세중소기업 임대전용단지"로 지정하여 지원(건

설교통부)