해수담수화 중장기계획 수립 추진

-------------------------------

건설교통부 수자원국 수자원정책과 504-9041

o 우리나라의 일부 해안.도서지역은 지형적 여건상 댐이나 하천 등 자체 지

표수 취수원의 확보가 곤란하여 만성적인 물부족으로 극심한 불편을 겪고

있으며, 일부 해안변에 위치한 공업지역의 경우도 용수부족으로 인한 가

동률 감소로 국가 경제에 손실을 초래하고 있다.

- 현재 전국 3,151개 섬중 475개 유인도에 약 26만명이 거주하고 있으나,

이중 안정적인 수돗물을 공급받는 인구는 2만 5천명으로 약 10%에 불과

하며(전국 평균급수량 : 395리터/일, 도서지역 : 100리터/일)

- 대부분 간이급수시설, 우물, 빗물 등 생활용수로 이용하고 있어 단기간

의 가뭄에도 생활용수가 고갈되어 매년 상습적인 식수난을 겪고있음.

o 이에 건교부에서는 해안 및 도서지역의 물부족을 해소하고 향후 다가올

물부족에 대비하여 수자원의 다원화 차원에서 보조수자원으로 해수를 담

수화하여 용수부족지역에 공급하기 위한 해수담수화 중장기계획을 관계기

관의 협의를 거쳐 확정할 계획이다.

o 본 해수담수화 중장기계획에서

- 현재 국내담수화 기술 및 운영현황을 바탕으로 담수화 도입시 경제성을

검토하고

- 또한, 우리나라 해안변에 위치한 해수담수화 가능지역 313개소중 간이

상수도 등 기존 용수수급계획으로 용수해결이 불가능한 41개 지역을 관

계부처 협의를 거쳐 해수담수화 대상지역으로 선정하여

- 2021년까지 총 985천입방미터/일의 해수담수화 시설을 설치할 계획이다.

<참고> 해수다수화 중장기 계획 주요 내용

<> 해수담수화 국내 현황

o 국내에는 기수와 해수를 원수로 사용하는 역삼투법에 의한 담수화시설

이 대부분이며 1998년말 현재 26개소가 설치.운영중

- 생활용수 : 경남 연도 등 22개소(시설규모 10-690입방미터/일)

- 공업용수 : 서산 현대정유 등 4개소(시설규모 480-84,000입방미터/일)

o 음용수를 생산하는 소규모 시설의 대부분이 국고지원에 의해 설치되어

해당 지자체 또는 각 시설실치 마을에서 자체운영중임.

o 공업용수로 사용되는 담수화 시설은 기수(염분이 적은 물)를 이용하여

해당기업에서 자체 건설 및 운영

<> 해수담수화 경제성

o 해수담수화에 의한 생산수 단가는 1,500-3,000원/톤(초기시설투자비 제

외)으로 상수도에 의한 용수 생산단가인 499원/톤의 3-6배로 현재는 경

제적 측면에서는 고가임.

o 따라서, 현재는 국민복지의 차원에서 해안 및 도시지역의 식수난 지역

을 중심으로 해수담수화를 도입하고

o 향후 장래 원수의 취사가 용이하고 가뭄이나 용수부족으로 인한 경제적

인 피해가 큰 해안의 임해공단지역 등에 보조수자원의 일환으로 해수담

수화사업 추진

<> 해수담수화 검토 대상지역

o 우리나라 해안변에 위치한 용수부족 지역중 입지적으로 해수담수화가

가능한 한강 등 5대권역에 총 313지역중 향후 용수부족이 예상되는 41

개 지역을 해수담수화 중장기 대상지역으로 선정계획

<> 연차별 투자계획

o 총 41개 지역을 대상으로 2021년까지 중.장기계획으로 추진

- 기존 수자원 개발의 상위계획과의 연계성 및 관련계획의 추진추이와

용수부족시기를 감안하여 2000-2021년으로 설정하고, 사업의 효율적

인 촉진을 위해 중.장기로 구분

(중기계획)

- 경남 마산 등 22개 지역(36.7천입방미터/일)

* 이중 16개 지역의 소규모 해수담수화 시설은 환경부에서 추진중

- 중기 사업은 효율적이고 체계적인 사업시행을 위하여 준비단계와 실

행단계로 구분하며 시행하되 준비단계에서는 세부시행 계획을 수립

. 1차 준비단계(2000-2003) : 법, 제도 정비 및 사업 주체선정

. 2차 준비단계(2004-2006) : 세부시행계획 수립

. 사업시행(2007-2011) : 연차별 사업추진 및 장기계획 재검토

- 중기사업의 초기년도는 2007년으로 설정하고, 2011년 이후는 중.장기

지역이 동시에 개발되도록 연차별 투자계획을 수립

(장기계획)

- 전남 여천 등 19개 지역(948.3천입방미터/일)

- 장기계획의 구체적 계획은 중기의 세부시행계획 수립시 검토