경부고속철도 2단계사업 용지매수 본격 착수

-----------------------------------------

건설교통부 건설지원과 500-2823

o 건설교통부는 경부고속철도 대구-경주-부산 2단계사업 구간에 대한 용지

매수를 금년부터 본격 착수한다고 밝혔다.

o 경부고속철도사업은 지난 '98년 7월 국가재정여건을 감안하여 2004년까지

서울-대구간 고속철도신선을 건설하고 대구-부산간은 기존선을 전철화하

여 서울-부산간 고속철도를 우선 개통하고 대구-경주-부산간 고속철도 신

선은 2004년 착공하여 2010년 완공하는 것으로 기본계획을 변경한 바 있

다.

o 그러나 대구-부산간 경부고속철도 2단계사업이 계획대로 2004년에 착수되

기 위해서는 무엇보다도 용지매수가 선행되어야 하므로 건설교통부는 소

요용지 119만평을 2004년 이전에 모두 매수완료하기로 하고 금년에는 예

산 358억원을 투입하여 62만평의 용지를 매수할 예정이다.

o 경부고속철도 대구이남구간중 문화재 발굴조사 등에 장기간이 소요되는

점을 고려 울산지역 등 일부 문화재분포지역에 대하여 '98-'99년도부터

용지매수를 착수한 바 있으나, 대구이남구간에서의 본격적인 용지매수는

금년부터 시작될 전망이다.

o 건설교통부는 금년에 용지매수를 추진할 지역은 용지보상감정평가가 완료

된 울산, 양산시 지역과 현재 관계절차가 진행중인 경산, 영천, 경주, 울

산시지역 및 부산광역시 금정구과 기장군 지역으로서

울산, 양산시 지역은 작년에 이어 금년에도 계속 용지를 매수할 예정이며,

관계절차가 진행중인 경산, 영천, 경주, 울산시지역 및 부산광역시 금정

구와 기장군지역은 금년 상반기중 실시계획승인, 보상계획 공고, 주민열

람 및 감정평가 등을 거쳐 금년 하반기부터 본격적인 용지매수가 시작된

다고 밝혔다.

* 용지매수 실적 및 계획

- 2000.3말 현재 전체 119만평중 13.4만평 매입(11.3%)

(단위 : 만평, 억)

=================================================================

전체    '98까지      '99          2000      2001 이후

-----------------------------------------------------------------

면적         119      4.6        7.3          62.1         45

예산       2,003       28         72           358       1,545

대상지역           울산지역  경산, 울산    경산, 울산,  대구이남

양산       양산, 대구    전지역

일부지역    이남전지역

=================================================================