우주센터 부지 선정

------------------

과학기술부 우주항공기술과 503-7633

과학기술부는 우주개발의  기반시설이 되는  『우주센터』를

전라남도 고흥군   봉래면 예내리   하반마을(봉래면 예내리 하반

마을, 동경127.30도, 북위 34.26도)에 건설하기로 하였다.

『우주센터』에는 총   150만평 규모의   부지에 5만평의

시설이 들어섭니다.  예산은  1,300억원을 투입하여 2005년

까지 완공할 계획이다.

『우주센터』건설부지의 선정은  '99년부터 전문가로  구성된

『우주센터건설자문위원회』가   수행한   경상남·북도,

전라남도,  제주도의  11개  지역에  대한  입지조건  평가를

기초로 하였다.  이  결과, 전라남도 고흥군  봉래면

예내리 지역과  경상남도 남해군  상주면 양아리(상주면  양아리)

지역이 최종 후보지로 추천되었다.

『우주센터추진위원회』는 양 지역에 대해  검토한 바  안전성,

인접국가 영공통과 등에서 문제가 거의 없고, 부지의 확보  및

확장에 보다 유리한 전라남도 고흥군 봉래면 예내리 하반마을을

최적지로 선정하였다.

우주개발은 통신, 방송,  환경, 국방,  국토관리 등  경제·

사회·과학기술·산업분야 뿐만  아니라 외교·안보  등  국가

위상면에서도 수행해야 할 전략사업다.

『우주센터』의 건설은  한국이  우주기술 선진국으로   진입

하려는 국가목표 달성에  박차를 가할  것이다.  앞으로

『우주센터』에는  우주박물관,  우주체험관   등을 건설하여

국민에게 꿈과 희망을 주는 과학기술문화 체험의 장으로 활용할

계획이다.

<< 우주센터 건설 추진계획 >>

<> 우주센터 개요

○ 기    능

- 인공위성을 지구궤도에  올리기 위한  로켓발사장 역활과

우주개발에 필요한 연구개발 실험활동 수행

○ 사업개요

- 부    지 : 안전구역 포함 150만평(시설부지 5만평)

- 투자규모 : 1,300억원

- 사업기간 : 2000∼2005

- 주요시설 : 로켓조립동,발사대, 추적장비,기타 지원설비등

Ⅰ. 우주센터의 필요성

○ 국내발사장 없이는 우주발사체의 개발 시험이 불가능

- 발사체기술 보유국(10개국)은  예외없이 자국내  발사장

운영

○ 고정밀   해상도의 관측위성(해상도  1m미만)은  해외발사

용역이 어려움

○ 인공위성의 해외발사용역에 따른 외화유출 방지, 해외시장

진출 기반구축

- 2015년까지 발사예정인 인공위성 9기의  해외 발사용역비는

8,500만불(1,020억원) 정도 소요

Ⅱ. 추진경위

○ '96. 4   우주개발중장기 기본계획 수립(종합과학기술심의회)

- 2010년까지 우주센터 건설 운영

○ '98. 11  우주개발중장기기본계획 수정(과학기술장관회의)

- 2005년까지 우주센터 건설 운영

○ '99.3∼12 우주센터 건립을 위한 기획조사사업 수행(항우연)

- 발사장 건설시 고려할 입지조건 분석, 후보지 조사

○ '00.1∼7 우주센터개발사업 예비타당성조사(기획예산처 주관

KDI 용역)

- 우주센터 건설의 타당성 인정

○ '00.4.20 2005년에 위성을  자력발사 하려는 목표를 차질없이

추진토록 대통령께서 지시(제4회 국가과학기술위원회)

Ⅲ. 연차별 소요예산

(단위 : 억원)

--------------------------------------------------

구   분  2000  2001  2002  2003  2004  2005    계

--------------------------------------------------

예   산   10    200   300   300   300   190  1,300

--------------------------------------------------

Ⅳ. 향후 추진계획

○ 2001.1             부지 선정발표, 기본설계 착수

○ 2001               상세설계, 부지매입, 장비 발주

○ 2002∼2003         토목 건축공사, 시설물 구축

○ 2004               지상 시설·장비설치, 우주센터 시험운영

○ 2005               시험발사, 저궤도 소형위성 발사(과학위성 2호)

Ⅴ. 우주센터의 활용 및 파급효과

○ 국내 인공위성의 자력발사 및 해외 위성발사 수주

- 2015년까지 다목적위성 4기, 과학위성 5기 발사

- 2010년부터 세계 중 소형 위성발사서비스 시장에  진출

하여 외화획득 가능

○ 로켓개발 시험장으로 활용

- 다목적위성 발사체의 엔진 연소시험 및 발사

- 국내 대학과 연구소의 과학관측용 로켓 발사

- 우주발사체 추적기술 등 관련 유도제어기술 개발·시험

○ 우주과학분야 {국민 교육의 장}으로 활용

- 청소년과 일반 국민에게  미래에 대한 꿈을  심어주고,

자긍심 고취

○ 인근 해상국립공원과 연계하여 세계적인 관광명소로 발전