용인 등 수도권 남부지역 교통개선대책 본격 추진

----------------------------------------------

- 철도·도로건설에 3조8천억원 투입 -

건설교통부 광역도로과 500-4086∼7

□ 지난 2000년 4월 8일  「수도권 난개발 방지대책」의 일환으로

건설교통부에서 발표하였던  「수도권  남부지역 교통개선대책」이

차질없이 추진되고 있는 것으로 나타났다.

□ 그동안 각 지자체가  독자적으로 개발계획을 세워  개발에

나섰기 때문에 인접도시간의 연계성부족, 환경악화 등을 유발하고,

- 주택건설  급증으로 교통난과   기반시설부족이라는 심각한

부작용이 예상되는 수도권 남부지역의  교통문제 해결을

위해 도로  7개노선(총 93.1㎞),  광역철도 2개구간(총 24.8

㎞)을 건설하는 것에 초점이 맞춰져 있는 동 대책은

- 발표당시 계획기간이  짧고, 총  3조 8,398억원이라는 막대한  재원이

소요된다는 점에서 실현 여부에  대한 많은 우려와 문제점이

지적되었으나,

- 현재까지의 추진  현황을 보면,  당초 완공목표인 2008년에는

모든 교통시설이 건설될 것으로 보인다.

□ 우선 2008년까지 건설할 철도시설중 오리∼수원(18.2㎞)구간은

현재 기본설계중에 있으며, 선릉∼왕십리(6.6㎞)구간은  실시

설계를 준비중에 있다.

- 특히, 수도권 남부지역 주민들의 전철이용을 활성화하기 위해

오리∼수원간 건설사업구간 중 우선 오리역∼죽전(1.5㎞)간은

2005년까지 조기 건설할 수 있도록 지난 해  10월에 턴키방식으로

발주하였으며,

- 발표당시  검토노선으로  제시된 신분당선(분당∼양재∼용산,

26㎞)은 현재 예비타당성 조사를  시행 중에 있으며, 그 결과에

따라 단계적으로 착수할 예정이다.

□ 총  7개노선 9개  도로구간(93.1㎞)을 신설  또는 개량하는

도로 건설사업의  경우, 현재  하갈∼상하간(5.1㎞) 및  중리∼

죽전간 일부  도로(4.8㎞)는  기준공되고, 나머지  구간(9.9㎞)은

공사시행 중으로 2004년 개통할 예정이며,

- 영덕∼양재간 도로  등 7개구간(73.3㎞)중 5개구간은  기본 및

실시설계를 시행하고 있고, 나머지 2개 구간은 설계준비중으로,

2002년에 착공하여  영덕∼양재  구간  등 59.3㎞는   2006년에,

나머지 의왕∼신림구간 등 14㎞는 2008년에 완공하게 된다.

- 특히, 영덕∼양재간(24.5㎞) 도로의 경우  승용차 위주의 교통

정책에는 한계가 있다는 점에서  버스의 이용율을 제고시킬  수

있도록 전체 6차로중 양방 2차로는  버스만 통행가능한 버스

전용도로(Busway)의 건설을   국내 최초로  도입하기  위하여

타당성을 검토중에 있다.

□ 건설교통부에서는 수도권 남부지역의 주택건설  및 입주가

지속적으로 이루어지고 있으나, 교통시설 건설사업은  물리적

한계로 2008년에야 전  노선이 완공된다는 점에서  단기교통

대책이 요구됨에 따라

- 우선 수원 및 용인지역에  6개 노선 100여대의 직행좌석형

버스를 금년 하반기부터 추가 운영토록 하고

- 가능한  고속도로를  이용한 출·퇴근시   버스전용차로제를

시행하여  지역주민의 교통편의를  제고하기 위해서   현재

타당성을 검토하고 있다.

<참고자료>  수도권 남부지역 교통개선대책 추진현황

□ 광역전철

----------------------------------------------------------------------------

구  분    시행자   연장  사업비         사  업  기  간

(km)  (억원)   -------------------------     추진상황

설   계       공사시행

----------------------------------------------------------------------------

분당선 연장          24.8  14,267

오리∼수원   철도청  18.2  10,244   '00.9-'02.12   '02-'08.12    기본설계중

선릉∼왕십리   〃     6.6   4,023   '01.4-'01.12   '02-'08.12    실시설계보

완준비중

----------------------------------------------------------------------------

□ 도    로

----------------------------------------------------------------------------

시행자  연장   사업비        사  업  기  간

(km)   (억원)  -------------------------   추  진  상  황

설   계       공사시행

----------------------------------------------------------------------------

계    93.1  24,131

----------------------------------------------------------------------------

①영덕∼양재

토 공   24.5   6,031  '00.12-'02.6  '02.4-'06.12  기본 및 실시설계중

②분당∼신림

22.0   6,600

o 분당∼고기리

주  공   4.5   1,000   '01.3-'02.7   '02.8-'06.12  기본 및 실시설계발주중

o 고기리∼의왕

경기도   6.5   1,200   '01.3-'02.7   '02.8-'06.12

o 의왕∼신림

11.0   4,400                   -'08.12     광역도로 지정 또는

민자유치 추진등 검토중

③신갈∼수지

용인시   7.0   2,100   '01.3-'01.12  '03.3-'05.3   기본  및 실시설계발주

준비중

④중리∼죽전

경기도,  14.7   2,940       완료    '97.5-'04.12  기준공(4.8km), 공사시행중

토공

⑤용인∼분당

토  공   10.0   3,000   '99.8-'01.9  '01.12-'04.12  기본 및 실시설계중

⑥하갈∼상하

경기도    5.1   1,020       완료      '97.8-'00.10   준공

⑦신갈우회도로

국  가    3.0     600   '00.12-'03.12 '04.3-'07.12   기본설계중

⑧구갈∼동백

토  공    2.0     400   '99.8-'02.6   '02.6-'04.12   기본 및 실시설계중

⑨삼막곡∼동백

주공,토공  4.8  1,440    '99.8-'02.6   '02.6-'04.12   기본 및 실시설계중

----------------------------------------------------------------------------