제주에 ITS시스템 본격 구축 추진

-------------------------------

건설교통부 수송정책실 교통정보기획과 504-9081

건설교통부와 대전광역시, 전주시, 제주시가 2000.9 협약을 체결하여 실시

설계, 사업자 선정 등 첨단교통 모델도시 사업을 추진과 결과 2001.9.14(금)

제주시의 기공식을 시작으로 본격적인 시스템 구축에 착수하게 되었음

<> '00.9 건설교통부와 대전, 전주, 제주시가 첨단교통모델도시 건설사업을

추진키로 하고 사업을 추진하여 왔으며 3개 모델도시중 제주시가 9.14

기공식을 갖고 본격적인 시스템 구축에 착수하였다.

o 동 행사에는 제주시 현경대 의원을 비롯하여 건설교통부, 정보통신부,

산업자원부, 경찰청 등 관련부처 관계자와 제주시 의회 및 사회단체 등

1천여명이 참가하였으며, 제주시장과 시공사 대표간 성실시공 조인식에

이어 테이프 컷팅행사를 가졌다.

<> 제주시는 동 기공식행사를 시작으로 총 208억원을 투자하여 제주지역에

ITS시스템을 본격 구축하고 월드컵대회 개최에 맞춰 '02.6 운영을 시작

할 계획이다

* 구축 시스템

- 실시간신호제어, 간선도로 교통정보제공, 돌발상황관리 등 첨단교통관

리시스템

- 실시간 교통상황, 최적운전경로, 대중교통이용정보, 주차.기상 등 카네

비게이트(CNS)를 이용한 첨단교통정보시스템

- 시내버스 및 시외버스 등 대중교통의 운행정보시스템

- 속도위반, 신호위반 등 자동단속시스템

<> 동 사업이 완료되면 제주시의 교통운영체계의 첨단화로 교통여건이 획기

적으로 달라질 것으로 판단되며, 제주시에 이어 대전시는 9월말, 전주시

는 10월 기공식을 가질 예정이다.

* 예상 사업효과

- 교통량에 따른 신호변경, 사고의 신속 처리로 효율적인 교통관리가 가

능하게 되어 교통체증을 획기적으로 개선

- 현재의 교통상황 등 다양한 교통정보를 알 수 있어 불필요한 운행이 감

소되고 보다 빠르고 편리하게 운전 가능

- 자동단속 강화로 교통법규 준수가 생활화되고 사고발생이 감소될 것임

- 시내버스 운행관리 및 운행정보제공으로 정시운행이 확보되고 버스 도

착시간을 알 수 있음.

<참고1> 첨단교통모델도시 추진상황 및 계획

<> 대전광역시

o 교통연과 사업관리계약 체결 : '00.10

o 최종 사업자선정(조달청) : '01.5

- LG기공 컨소시움(LG전자, 정봉기술, 광전사, 금성백조 등)

o 실시설계 : '01.7

o 사업자 계약 체결 및 기공식 : '01.9

o 시스템 구축 : '02.3

o 시험운영 및 운영개시 : '02.6

<> 전주시

o 국토연과 사업관리계약 체결 : '00.10

o 최종 사업자선정(조달청) : '01.6

o 실시설계 : '01.9

o 사업자 계약 체결 및 기공시 : '01.10

o 시스템 구축 : '02.3

o 시험운영 및 운영개시 : '02.6

<> 제주시

o 건기연과 사업관리계약 체결 : '00.10

o 최종 사업자선정(조달청) : '01.5

- SK씨엔씨(삼성전자, 송현 알엔디, 광명전기통신 등)

o 실시설계 : '01.7

o 시스템 구축 : '02.3

o 시험운영 및 운영개시 : '02.6

<참고2> 첨단교통모델도시 사업개요

<> 대전광역시

o 사업비 : 485억원(민자 200억, 정부지원 147억원)

o 구축시스템

- 간선도로 : 교통신호제어, 교통정보제공, 돌발상황관리

- 고속도로 : 교통관리, 돌발상황관리, 자동요금징수

- 정보제공 : 기본정보, 여행자정보

- 위반단속 : 속도위반, 신호위반, 버스전용차로위반

- 시내버스 : 운행관리.운행정보제공, 요금전자지불

<전주시>

o 사업비 : 171억원(민자 63억, 정부지원 60억원)

o 구축시스템

- 간선도로 : 교통신호제어, 교통정보제공, 돌발상황관리

- 정보제공 : 기본정보, 여행자정보, 운전중 교통정보

- 위반단속 : 속도위반

- 시내버스 : 운행관리.운행정보제공

<제주시>

o 사업비 : 208억원(민자 61억, 정부지원 69억원)

o 구축시스템

- 간선도로 : 교통신호제어, 교통정보제공, 돌발상황관리

- 고속도로 : 돌발상황관리

- 정보제공 : 기본정보, 여행자정보

- 위반단속 : 속도위반, 신호위반

- 시내버스 : 운행정보제공

* 시외버스정보제공과 서귀포시 교통관리시스템을 병행 구축 추진

<참고3> 미국의 ITS 선도사업(MDI) : Model Deployment Initiative Program

<> 사업목적 : 미국내 대도시권에 본격적으로 통합 ITS사업을 실시하기 위

하여 추진하고 있은 시범사업

<> 사업내용

o 뉴욕 대도시권의 Transcom

- 사업비 : $18.9million(연방기금 $10.4million)

- 사업내용

. 주행차량 자동인식, 교통류모니터링, 돌발상황 감지

. 무료교통정보제공(인터넷, 교통방송, ARS서비스 등)

. 여행자정보제공(철도, 도로, 항공 등 실시간 교통정보)

o 텍사스주 샌안토니오의 Transguide

- 사업비 : $13.5million(연방기금 $7.1million)

- 사업내용

. 병원 응급실과 응급차량간 영상교신

. 노변단말기를 이용 실시간 교통정보 제공

. 최단운행경로 등을 전자지도 및 음성으로 전달

. 주행차량인식시스템 : 속도, 위치 등 확인

o 아리조나주 피닉스의 AZTech

- 사업비 : $18.5million(연방기금 $7.5million)

- 사업내용

. 교통정보를 종합하여 교통상황관리

. 대중교통체계 개선 및 여행자 정보제공

o 워싱톤주 시애틀 : Smart Trek

- 사업비 : $54.8million(연방기금 $13.7million)

- 사업내용

. 고속도로와 간선도로의 교통정보 제공

. 대중교통정보 제공 및 스마트카드 요금지불

. GPS를 이용한 첨단 119 시스템