부산차량기지 건설 추진

----------------------

건설교통부 고속철도기획단 운영기획과 507-1384

o 경부고속철도를 서울에서 부산까지 운행하는데 필요한 시설인 "부산차량

기지"가 건설된다. 이는 현재 건설중인 경기도 고양시에 있는 서울차량기

지와 함께 고속철도 차량의 배치와 안전점검을 위해 양끝 지점에 있어야

할 필수 시설이다

- 이 사업은 부산시 부산진구 당감동에 위치한 군부대를 이전시키고 그

자리(약 11만평)에 2004년 3월까지 총 1,949억원을 투입하여 고속열차

를 유지.보수 검사 및 배차를 위한 기지창을 건설하는 것이다.

o 이에 따라, 건설교통부는 한국고속철도건설공단이 시행하는 "부산차량기

지건설사업"에 대한 실시계획을 관계부처 및 지방자치단체와 협의를 거쳐

승인.고시(10월 29일)한다고 밝혔다.

o 이 시설이 완공되면 부산에서 출발하는 고속철도의 배차대기와 철저한 검

사를 통해 고속열차의 안전성 및 정시성을 확보하고 2004년 4월 개통 예

정인 서울-부산 간 영업운행에 대비하게 될 것이다.

<참고> 부산차량기지 건설사업 개요

<> 사업개요

o 위치 : 부산광역시 부산진구 당감동, 개금동 일원

o 면적 : 361천평방미터(109쳔평)

o 규모 : 차량 22편성 주차 및 37편성 경수선 시설

o 사업비 : 1,949억원

o 사업기간 : 2001.12-2004.3

<> 추진경위

o '93.12 : 부산차량기지 기본설계 완료

o '96.4 : 국방부는 군 요구 대체시설 확보 조건부 이전동의

o '96.12 : 공단과 육군간에 군사시설 이전 합의각서 체결

o '98.7 : 경부고속철도기본계획 변경시 부산차량기지의 위치를 "부산진

구 당감동" 으로 지정

o '00.3 : 군사시설 이전공사 착공('02.3 준공 예정)

o '00.8-'01.7 : 부산차량기지 실시설계 및 입체화타당성조사용역

o '01.7 : 부산차량기지 실시설계.교통영향평가 관련 고속철도 건설심의

위원회 심의

o '01.9 : 부산차량기지 환경영향평가 협의 완료

o '01.10 : 부산차량기지 건설공사 실시계획 승인

<> 향후 추진계획

o '01.12 : 차량기지 건설공사 착공

o '04.3 : 차량기지 건설공사 준공