수도권 매립지 매립가스 발전시설 본격 가동

-----------------------------------------

수도권매립지관리공사 연구개발처 (032)568-7104

<> 주요 내용

o 매립가스 자원화기술의 새로운 출발점 열려

- 11월 28일 매립가스 발전시설(6.5MW) 준공

o 기후변화협약 등 국제적인 환경규제에 능동대처 가능

o 수도권(서울.인천.경기)에서 발생되는 폐기물을 위생매립하고 있는 수도

권매립지관리공사(사장 이정주)는 매립가스 자원화의 첫번째 사업으로

6.5MW(6.500kW) 발전시설을 11월 28일 준공하고 본격가동을 시작한다고

밝혔다.

o 금번의 발전사업에는 총 102억원이 투자되었으며 시설설치후 투자비를 회

수하는 기간동안(개시후 3년) 시설 설치업자에게 운영권을 부여하는 Lease

방식으로 추진하여 투자비 회수후 권리전환을 받게 됨에 따라 초기 투자

에 대한 위험부담 없이 시설을 설치하게 되었을 뿐만 아니라 Lease 기간

동안 최대의 기술력을 축적할 수 있게 되었으며, 연간 30억원(자체소요전

력 24억원, 한전판매 6억원)의 전력생산이 가능할 것으로 기대하고 있다.

o 매립가스는 주변지역 악취발생 등 생활환경피해를 방지하기 위해 그 동안

은 단순 소각처리해 오던 것을 발전사업을 계기로 청정연료로 재활용할

수 있게 됨에 따라 주변지역 환경개선에도 크게 기여할 것으로 기대하고

있으며

o 특히, 매립가스의 90% 이상을 차지하고 있는 메탄(CH4)과 이산화탄소(CO2)

는 기후변화협약에 의한 대표적인 규제대상물질로 환경부 주도하에 우리

정부에서도 효과적이고 자발적인 온실가스 감축방안을 마련중인 바, 금번

의 발전사업이 매립가스 청정개발체제(CDM) 도입에 크게 기여 할 수 있을

것으로 내다보고 있다.

o 아울러, 동 사업은 현재 추진중인 50MW급의 발전사업에 촉진제 역할을 할

것으로 예상되며 광역 매립지를 운영하는 지자체로 하여금 매립가스 자원

화사업에 대한 관심과 추진을 촉진시키는 계기가 될 수 있을 것이라는 평

가를 받고 있다.

<참고> 수도권매립지 매립가스 발전사업 추진현황

I. 목적 및 필요성

<> 매립지에서 발생되는 가스는 악취 등 주변지역 대기환경 문제의 주요

원인, 매립장 안정화 및 사후관리에 지장초래

<> 발생가스를 단순 소각처리에서 발전에 의한 자원화방식을 채택함으로

써 주변지역 대기환경 문제의 근원적 해결 및 경제적 부가가치 창출

기반 조성

<> 기후변화협약에 의한 온실가스 감축의무 부여시 국가적 대응능력 제고

II. 사업개요

<> 가스발생.포집량 예측(2039년까지)

- 발생량 예측 : 833입방미터/분-901입방미터/분

- 발전을 위한 포집가능량 : 550입방미터/분-630입방미터/분

<> 발전시설 설치 현황

=================================================================

1단계(완료)                 2단계(추진중)

-----------------------------------------------------------------

규모

- 6.5MW(가스엔진)                 - 50MW(발전형식 미정)

. 자체전력 대체용                 . 상업발전용

-----------------------------------------------------------------

추진방식

- 발전시설 : Lease 발식           - 민자유치(BTO)방식

. 투자비 회수후 공사인수.운영

- 부대공사 : 공사 직접투자

-----------------------------------------------------------------

사업비

- 발전시설 : 9,554백만원          - 850억원(추정)

- 부대공사 : 643백만원

-----------------------------------------------------------------

사업기간

- 2001.1-2001.11.28               - 2004년 완료예정

-----------------------------------------------------------------

시공사

- 발전시설 : HAASE(독), 상원      - 사업시행자 선정중

ENC공동

. 우선협상대상자로 선정된(가

- 부대공사 : 태화전설(주)            칭)김포에너지(주)와 협상 실

시중(2001.12월 완료예정)

=================================================================

<> 기대효과

- 매립가스로 인한 악취 등 대기환경 문제 근원적 해소

- 연간 200억원(6.5MW : 약 30억원)의 수익 발생(54.9원/KWH 기준)

. 50MW발전시 10만여 가구 공급가능 규모

* 1가구당 평균 사용량 500W 기준

- 온실가스저감 효과

. 청정개발체제(CDM) 도입시 편익 : 약 50-75억원/년

III. 향후 추진계획

<> 6.5MW 발전시설 : 2001.11.28 준공

<> 50MW 발전시설

- 시공업체 선정 : 2002.1

- 실시계획 승인 : 2002.11

- 공사 착공 : 2002.11

- 공사 완공 : 2004.11