사용종료매립지 정비지침 확정

----------------------------

환경부 폐기물자원국 생활폐기물과 2110-6925

<> 주요 내용

o 1단계로 사용종료매립지 환경영향조사 실시('02.1월까지)

o 2단계로 환경영향조사결과 주변환경에 미치는 영향이 큰 매립지에 대하

여는 정밀조사 실시('02.4월까지)

o 정밀조사 결과 주변환경에 미치는 영향이 큰 매립지에 대하여는 정비대

상 매립지로 선정하고 정비 우선순위를 결정, 2010까지 연차별로 정비

사업을 추진키로 함.

<> 환경부 조사에 의하면 2001년말 현재 폐기물관리법 제정(1986) 이전부터

단순 투기식으로 매립되어 현재 사용이 종료된 1,214개소의 매립지가 전

국에 산재해 있다.

<사용종료매립지 지역별 현황>

=================================================================

계    서울   부산   대구   광주   인천    울산  대전   경기

-----------------------------------------------------------------

계  1,214    1      2      4      35     22     1     60    115

=================================================================

=================================================================

강원     충북     충남     전북    전남    경북   경남   제주

-----------------------------------------------------------------

118      36       259      88      208     177    64     23

=================================================================

<> 환경부에서는 사용종료매립지중 상수원에 직접 영향을 미치거나 월드컵

경기장 주변 등에 위치하고 있어 우선적으로 정비가 필요하다고 판단되

는 89개소의 사용종료매립지에 대하여는 '96-'02까지 1,153억원의 국고

를 지원하여 '01까지 61개소(787억원)을 정비하였고 금년에는 28개소

(366억원)에 대한 정비사업을 추진할 계획으로 있다.

<> 전국의 사용종료매립지(1,214개소)중 우선적으로 정비되었거나 정비계획

인 89개소를 제외한 1,125개소에 대한 효과적인 정비와 관리를 위하여

환경부는 "사용종료 매립지 정비지침"을 확정, 발표했다.

<> 이 지침에 따르면

- 1단계로 1,125개소 매립지에 대하여 침출수 처리실태, 지하수 이용현황

등 총 18개 항목에 의거 환경영향조사를 "환경영향 인자별 조사항목 및

배점기준표"에 따라 '02.1월말까지 실시하여 그 결과에 따라 사후관리

가 필요한 매립지와 필요하지 않은 매립지로 구분하고

- 2단계로 사후관리가 필요한 매립지에 대하여는 안정화정도 등 정밀조사

를 '02.4월말까지 실시하여 정비가 필요한 매립지를 선정함과 동시에

정비의 우선 순위를 결정, 2010년까지 연차별로 정비할 계획이다.