각 부처 대형투자사업, 총사업비 3.1조원 증액요구

-----------------------------------------------

기획예산처 투자관리과 3480-7836

<> 정부 각부처는 2003년도 예산편성에 앞서 203개 대형투자사업에 대해 3

조 1,218억원의 총사업비 증액(5.9% 증가)을 기획예산처에 요구하였음.

※ 총사업비 증액요구액(203개 사업)

: (현행) 53조 3,910억원 → (변경요구) 56조 5,128억원(5.9%, 3조

1,218 억원 증)

o 이는 2000년 이후 3년 연속 한자리수 증액요구로 그동안의 총사업비 관

리강화 효과가 지속적으로 나타나고 있는 것으로 판단됨.

<총사업비 변경요구 추이>

(단위 : 조원, %)

=================================================================

'98         '99         '00        '01        '02

-----------------------------------------------------------------

증액요구액     19.1        15.4        5.5        1.7        3.1

요구증가율     28.0        19.3        7.4        3.8        5.9

=================================================================

<> 각 부처가 요구한 총사업비 변경요인은

o 물량증가 16,102억원, 보상비증가 11,598억원, 설계결과 11,931억원,

물가인상 6,547억원, 낙찰차액 △15,068억원 등임.

<총사업비 변경요인 : 각부처 요구기준>

(단위 : 억원)

=================================================================

계      물량증가  보상비증가   설계결과   물가인상   낙찰차액

-----------------------------------------------------------------

31,218*    16,102     11,598      11,931      6,547    △15,068

=================================================================

주) * 부대비 등 107억원 포함

<> 분야별 변경요구 내역을 살펴보면

o 댐(37.8%), 철도(18.1%), 항만(7.0%), 농업개발(11.7%), 건축(14.8%)

등에 대한 총사업비 증액요구가 크며

o 도로(△6.9%)는 감액을 요구

<분야별 총사업비 변경요구 현황>

(단위 : 억원, %)

=================================================================

현행          요구          증감        (률)

-----------------------------------------------------------------

고속도로(7)        54,679        54,741            62        0.1

도로(120)         137,737       128,222       △9,515      △6.9

항만(29)          104,167       111,495         7,328        7.0

철도(8)            58,857        69,530        10,673       18.1

도시철도(4)        77,638        78,739         1,101        1.4

댐(2)              26,834        36,985        10,151       37.8

농업개발(7)        35,965        40,184         4,219       11.7

건축(17)           14,201        16,298         2,097       14.8

치수 등(9)         23,832        28,934         5,102       21.4

-----------------------------------------------------------------

계(203)         533,910       565,128        31,218        5.9

=================================================================

<> 기획예산처는 금년도 상반기까지 총사업비 조정작업을 마무리하여 2003

년도 예산에 반영할 계획임.

o 증액을 요구한 사업 중 부실공사 방지, 안전시공, 물가인상, 법정시설

소요 등 불가피한 경우 인정해줄 방침이나

o 설계변경, 사업물량 증가 등을 이유로 총사업비를 대폭 증액 요구한 경

우에는

- 불요불급한 요인을 면밀히 검토하여 필요최소한으로 증액하되, 사업

기간의 조정도 동시에 검토하고

- 설계부실 또는 총사업비관리지침 위반사항에 대하여는 관련자에게 엄

격한 책임을 묻도록 하며

- 필요시 사업의 타당성을 재검증토록 하고, 총사업비 조정을 유보할

계획임.

<> 특히, 공정하고 객관적인 총사업비 조정을 위하여

o 「총사업비 조정원칙과 기준」을 마련하고

o 총사업비 심의과정에 사업수행기관 관계자가 직접참여하여 의견을 개진

할 수 있는 기회를 부여하며

o 민간전문가의 자문 및 현장확인을 실시할 계획임.

<참고1> 1,000억원 이상 증액요구사업

(단위 : 억원, %)

=================================================================

현행      요구     증가액   증가율            비고

-----------------------------------------------------------------

다목적댐 건설지원

25,227    35,378    10,151    40.2    . 신규댐(화북, 한탄강,

적성, 감천)보상비

굴포천 종합치수

4,949     9,676     4,727    95.5    . 국고보조 신규요구

2,500억원, 설계결과

덕소-원주 복선전철

10,789    14,216     3,427    31.8    . 노반설계결과 3,327 등

조치원-대구 전철화

5,491     7,797     2,306    42.0    . 선형개량 2,192 등

의정부-동안간 복선전철

5,228     6,589     1,361    26.0    . 역신설 200, 교차로 개

선 422 등

용산-문산 복선전철

8,781    10,162     1,381    15.7    . 역사 실시설계결과

1,341 등

부산신항

17,048    21,628     4,580    26.9    . 부두3선석추가 3,165

등

광양항(3단계) 개발

4,622     9,466     4,844   104.8    . 항로준설 3,065,

일반부두 1,151 등

평택항(2단계) 개발

4,084     7,173     3,089    75.6    . 준설량 증가 1,642,

호안 7.7km 추가 928

등

인천북항

1,999     3,665     1,666    83.3    . 준설량 증가 1,030 등

포항영일만 신항개발

6,838     8,452     1,613    23.6    . 부두 확대(500 → 1,000m)

등

새만금 방조제

17,042    19,858     2,816    16.5-   . 물가인상 1,646 등

-----------------------------------------------------------------

계

112,098   154,060    41,961    37.4

=================================================================

<참고2> 30% 이상 증액요구사업

(단위 : 억원, %)

=================================================================

현행      요구     증가액   증가율            비고

-----------------------------------------------------------------

다목적댐 건설지원

25,227    35,378    10,151    40.2    . 신규댐(화북, 한탄강,

적성, 감천) 보상비

굴포천 종합치수

4,949     9,676     4,727    95.5    . 국고보조 신규요구

2,500억원, 설계결과

등

덕소-원주 복선전철

10,789    14,216     3,427    31.8    . 노반기본설계결과 등

조치원-대구 전철화

5,491     7,797     2,306    42.0    . 선형개량 및 입체화

광양향(3단계)

4,622     9,466     4,844   104.8    . 물량 증가, 보상비

증가 등

평택항(2단계)

4,084     7,173     3,089    75.7    . 준설변경, 호안추가

인천북항

1,999     3,665     1,666    83.3    . 준설추가 등

영월교도소 신축

224       347       123    55.1    . 규모 확대

중앙박물관 신축

3,291     4,288       997    30.3    . 지하층 증설 등

(3.2 → 4.0만평)

예술종합학교 제2교사

800     1,167       367    45.9    . 단가인상

(470 → 546만원/평)

태권도공원조성

1,000     1,644       644    64.4    . 개략사업비

(타당성조사단계)

우주센터개발

1,500     2,038       538    35.8    . 우주체험관 시설 등

추가

첨단방사선이용연구센터

247       477       230    93.0    . 감마조사시설 확대,

이온빔시설 추가 등

강원지방경찰청

214       346       133    62.2    . 지하주차장 확대 등

(5,000 → 7,015평)

충북지방경찰청

214       307        94    43.9    . 지하주차장 1,504평

설치 등

국회보존서고동

278       432       154    55.4    . 지하주차장 설치 등

(4,800 → 8,854평)

-----------------------------------------------------------------

계

64,929    98,417    33,490    51.6

=================================================================