금년중 5개 고속도로 완공, 8개 고속도로 착공

-------------------------------------------

기획예산처 건설교통예산과 3480-7845

□ 정부는 금년안에  안중∼평택, 천안∼논산 등  5개 고속도로를

개통하고, 평택∼음성, 목포∼광양 등 8개 노선을 신규로

착공할 계획임

-------------------------------------------------------------------------

'02  ·신설노선 : 안중∼평택(28㎞), 천안∼논산(80㎞), 여주∼충주(42㎞)

개  ·확장노선 : 판교∼퇴계원(34㎞), 천안IC∼JCT(8㎞)

통

-------------------------------------------------------------------------

'02  ·신설노선 : 평택∼음성(31㎞), 목포∼광양(105㎞), 무안∼광주(43㎞)

착               양평∼여주(21㎞), 고창∼장성(17㎞)

공  ·확장노선 : 한남∼반포(2㎞), 김천∼구미(17㎞), 성서∼옥포(9㎞)

-------------------------------------------------------------------------

□ 금년에 신규로 개통되는 노선중

ㅇ 안중∼평택 구간은  서해안 고속도로와  경부고속도로를

동·서로 연결시키는 노선으로 향후 평택∼음성∼제천

까지 연장될 계획이며

ㅇ 천안∼논산 구간은 경부고속도로와 호남고속도로를

직접 연결하여 회덕분기점의 교통애로가 크게 해소되며,

천안∼논산간 주행시간이 20분(70분 → 50분) 단축됨

ㅇ 여주∼충주 구간은 중부내륙고속도로의 일부구간으로

충주, 수안보 지역을 통과하므로 이 지역의 관광사업이

크게 활성화 될 것으로 기대됨

□ 금년중 착공하는 노선은 주로 동서방향 고속도로이며,

남북방향의 고속도로 사업이 대부분 마무리됨에 따라

평택∼음성, 목포∼광양 등 동서로 연결하여 기존 남북 고속

도로망의 효율성을 높이기 위한 것임

ㅇ 무안∼광주와 고창∼장성 노선은 서해안선과 호남선을

연결하며, 목포∼광양 노선은 서해안선과 남해안선,

평택∼음성 노선은 경부선과 중부선을 연결함

ㅇ 금년 착공예정인 신설노선 중 양평∼여주 구간이 남북

방향이며, 중부내륙고속도로를 북쪽으로 연장하여 수도권

동부지역에 연결시키기 위한 것임

ㅇ 이 밖에도 경부선 한남∼반포, 김천∼구미 구간은 4 → 6차선

으로 확장하고 구마선 성서∼옥포 구간은 4 → 8차선

으로 확장하게 됨

ㅇ 금년에 착공하는 고속도로는 2007년까지 총 6조원을 투입

하여 완공시킬 계획으로 경부선 한남∼반포 및 김천∼구미간

확장노선은 상반기에 착공하고, 나머지 6개 노선은

하반기에 착공할 계획임

<별첨>  2002년 고속도로 착공 및 개통

< 2002년 착공 >

--------------------------------------------------------------------------

구분     사업명   연장(km)  차로수   기간    사업비 `02예산  착수시기

--------------------------------------------------------------------------

계                253.6                     60,815  1,900

--------------------------------------------------------------------------

신설     소계      225.0                     56,721  1,400

고창∼장성    17.0       4   `02∼`06   6,094    400  `02하반기

양평∼여주    29.0       4   `02∼`06   6,293    200      〃

평택∼음성    31.0       4   `02∼`06   6,814    400      〃

무안∼광주    43.0       4   `02∼`07  10,890    200      〃

목포∼광양   105.0       4   `02∼`07  26,630    200      〃

--------------------------------------------------------------------------

확장     소계       28.6                      4,094    500

한남∼반포     1.9     4→6  `02∼`04     400    200  `02상반기

김천∼구미    17.4     4→6  `02∼`05   1,303    100      〃

성서∼옥포     9.3     4→8  `98∼`03   2,391    200  '02하반기

--------------------------------------------------------------------------

< 2002년 개통 >

--------------------------------------------------------------------------

구분    사업명    연장(km)  차로수   기간    사업비  `02예산  개통시기

--------------------------------------------------------------------------

계                 191.7                    32,847   8,204

--------------------------------------------------------------------------

신설     소계       149.6                    25,496   6,632

천안∼논산     80.0     4    `96∼`02  14,386   4,036  `02. 12

안중∼평택     28.0     6    `97∼`02   5,652   1,301     〃

여주∼충주     41.6     4    `96∼`02   5,458   1,295     〃

--------------------------------------------------------------------------

확장     소계        42.1                     7,351   1,572

천안IC∼JCT     7.8    6→8  `00∼`02     472     172  `02. 12

판교∼퇴계원   34.3    4→8  `97∼`02   6,879   1,400     〃

--------------------------------------------------------------------------