용담호 수질개선에 2006년까지 1,702억원 투자

-------------------------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 하수처리장 9개소 등 환경기초시설 설치

<> 환경단체 등이 참여하는 민·관협의회 운영

<> 환경부는 한국수자원공사에서 수립하고 수계별협의회을 거쳐 전북도가

제출한 용담댐 수질오염방지대책을 확정 발표했다.

o 무주군·진안군·장수군에서는 국비 양여금 1,073억원 등 1,555억원을

투자, 하수처리장 설치(9개소), 하수관거 정비(123㎞), 마을하수도 설

치(74개소), 축산폐수처리시설 설치(3개소) 사업과 진안천 오염하천정

화사업(7.5㎞) 등 호외(호외)대책을 추진하고

o 한국수자원공사에서는 147억원을 투자, 댐내폐기물 처리, 인공습지 조

성, 수중폭기장치 설치 등 호내(호내)대책을 추진토록 하였다.

<> 전주지방환경청에서는 한국수자원공사와 협조하에 용담댐 상류 유입하천,

호소의 수질오염 변화 추이 등을 지속적으로 모니터링하고 그 결과를 전

주지방환경관리청·수자원공사 인터넷 홈페이지에 게시하여 지역주민,

일반인들이 알 수 있도록 공개하게 된다.

<> 또한 수질오염방지대책의 이행 상황을 평가·보완하여 실효성이 확보되

도록 관계기관 및 환경단체 등이 참여하는 『민·관협의회』를 전라북도

에 설치 운영하고, 3년마다 대책 내용을 보완해 나가기로 했다.

<참고1> 용담댑 수질오염방지대책

<> 추진 경위

o '98.12.11 : 국무총리실에서 용담댐 수질보전대책 수립 지시(수질개선

기획단 → 관계기관)

- 한국수자원공사 주관으로 수질오염방지대책(안)을 수립하고, 전북도

에서 수계별협의회를 거쳐 합의한 대책(안)을 환경부 승인 받아 시행

o '01.4.3 : 용담댐 수질오염방지대책(안) 제출(전북도 → 환경부)

o '01.4.20 : 수질오염방지대책(안) 보완요구(환경부 → 전북도)

- 전북도에서 보완사항 제출('01.6.22)

o '01.4.4∼'01.11.14 : 수질오염방지대책에 따른 수질 예측 결과 검토

(국립환경연구원)

o '01.11.17∼'02.4.24 : 수질오염방지대책(안)과 수질 예측 결과에 대해

관계기관·지역시민단체·전문가 설명회 등 협의

Ⅰ. 현황

<> 용담댐 사업개요

o 사업목적 : 전주권 용수공급, 홍수피해 방지

- 용수공급 : 650백만톤/년(생활용수 105만톤/일, 공업용수 30만톤/

일, 하천유지용수 43만톤/일)

o 사업내용 : 댐(H 70m, L 498m), 도수터널 21.9㎞

o 사업기간 : '91∼2001년

o 사업비 : 15,295억원

o 사업시행자 : 한국수자원공사(승인기관 건설교통부)

o 추진현황 : 2001.10.13 댐공사 완공

o 댐유역현황

- 용담댐의 유역면적은 930㎢, 유입하천은 금강상류

- 유역내 진안군, 장수군, 무주군 일부가 위치(3군·2읍·12면)

<> 유역내 오염원 현황

o 1일 오·폐수 배출량 : 23천톤/일

- 생활하수 19천톤(83%), 축산 1천톤(4%), 산업폐수 3천톤(13%)

<용담댐 유역내 오염원 현황>

=================================================================

점오염원                     비점오염원

----------------------------------------------- ----------

인구           축산          산업체    양식장   토지이용

(인)           (두)           (개)       (㎡)      (㎢)

-----------------------------------------------------------------

현황    54,269    . 육우 : 21,558       32       3,116      930

. 젖소 : 1,680

. 돼지 : 35,277

. 닭   : 385,823

=================================================================

<> 용담댐 수질현황

o 용담댐의 수질은 COD 기준으로 상수원수 2등급 수질(COD 3mg/L 이하)

로서 대체로 양호하나, 총질소의 농도가 높게 나타남.

<2001년 용담댐 오염도 측정결과>

(단위 : mg/L)

=================================================================

BOD        COD     총질소(T-N)   총인(T-P)          비고

-----------------------------------------------------------------

1.3        2.4       1.345         0.026     - BOD, COD,

(0.4∼2.4)(1.3∼4.3)(0.772∼1.983)(0.018∼0.035)  총인 : 상수원수

2등급

=================================================================

주) 환경부 전주지방환경청의 2001.4∼12월간 격월 측정결과(5회) 평

균치임.

Ⅱ. 수질오염방지대책

1. 대책의 내용

<> 개요

o 목표년도 : 2006년

o 사업계획

- 하수처리시설 9개소, 마을하수도 74개소, 분뇨처리시설 3개소,

축산폐수공공처리시설 1개소, 하수관거 정비 123㎞ 등 환경기초

시설 설치

- 인공습지 조성, 상수원보호구역 지정, 오염하천정화, 댐내 폐기

물처리 등

o 사업비

- 2006년까지 총 1,702억원 투자

※ 국고 131억원, 지방양여금 1,073억원, 도비 221억원, 시·군

비 261억원, 기타 16억원

<대책사업비 총괄>

(단위 : 억원)

=================================================================

사업내용            사업기간      사업비

-----------------------------------------------------------------

합계                                                 1,702

-----------------------------------------------------------------

환경기초시설(4개 사업)                                     1,483

하수처리시설      9개소(12.4천톤/일)       '99∼2005        744

마을하수도        74개소(3.2천톤/일)       2001∼2006       310

하수관거          진안, 무주, 장수(123㎞)  2006까지         197

축산폐수          3개소(330톤/일)          '94∼2005        232

공공처리시설

-----------------------------------------------------------------

오염하천정화사업  진안천 등 3개소(7.5㎞)    '97∼2003         72

-----------------------------------------------------------------

댐내폐기물처리    건물철거 3천세대, 수목    '95∼2001        131

713ha, 잔재물제거 등

-----------------------------------------------------------------

기타              인공습지조성 55천㎡,      2000∼2006        16

수중폭기장치 10기 등

=================================================================

<> 환경기초시설 확충

o 하수처리시설 설치

- 용담댐 상류지역의 생활하수, 공장폐수 등을 처리하기 위하여

2005년까지 하수처리장 4개소(9.9천톤/일, 507억원) 설치

(단위 : 천톤/일, 억원)

=================================================================

처리장명       진안           장수           장계         안성

-----------------------------------------------------------------

시설용량          3              2              2          2.9

사업비          130             87            150          140

사업기간     2000∼2003     '99∼2003     '99∼2003     2002-2005

=================================================================

주) 안성하수처리장은 사업기간중 우선 1,300톤/일을 건설

- 진안군 5개소에 2005년까지 면급 하수처리시설(2.5천톤/일, 237

억원) 설치

o 마을하수도 설치

- 하수처리구역 외에 산재된 소규모 마을단위의 생활오수처리를 위

하여 2006년까지 마을하수도 74개소(3.2천톤/일, 310억원) 설치

o 하수관거 정비·확충

- 2006년까지 하수관거 123㎞(무주군 3㎞, 진안군 48㎞, 장수군 72

㎞) 신설·정비

<> 축산분뇨 관리대책

o 축산폐수의 처리(재활용을 우선하고 불가피시 정화처리)를 위하여

축산폐수공공처리시설 3개소(330톤/일, 232억원) 설치

o 산재된 축산농가에서 발생하는 축산분뇨 수거처리를 위하여 장수군

에 액비저장탱크(2천톤)를 설치하고, 진안·무주·장수군 23개소에

축산분뇨 자체 처리시설 설치 지원

<> 비점오염원 관리대책

o 상수원보호구역 지정

- 오염원의 입지제한과 오염발생 행위제한을 위하여 용담댐 유역에

상수원보호구역 지정

- 상수원보호구역지정 전 낚시금지구역 지정(36.24㎢, 2002.1.31)

o 비위생매립지 정비

- 차수막과 침출수 처리장을 갖추지 아니한 비위생 쓰레기 매립지

를 정비하여 강우유출 등에 의한 비점오염물질 최소화(진안군 1

개소, 장수군 5개소)

o 오염하천 정화사업 추진

- 진안천(2.3㎞), 사양천(4.2㎞), 장수천(1.0㎞)에 하천정화사업

추진

o 수변구역 지정·관리

- 용담댐 계획홍수위로부터 1Km 이내 지역을 수변구역으로 설정하

여 오염원의 입지를 제한함으로써 자정과정 없이 오염물질이 유

입되는 것을 방지

<> 기타 관리대책

o 부유쓰레기 처리대책

- 홍수시 저수지 내로 유입되는 부유물 처리를 위해 저수지 상류에

부유물 유입차단시설 3개소(금강본류, 정자천, 주자천) 설치

o 댐내 페기물 처리대책

- 수몰지내 건축물, 교량, 수목 등을 제거하고 잔재물을 정리하여

담수 후 오염을 사전에 방지

o 오수처리대책지역 지정 추진

- 하수처리구역 외의 지역에서 배출되는 생활오수 및 분뇨 처리를

위해 9개 지역(진안 7, 장수 2, 132㎢) 지정

o 인공습지 설치

- 용담댐 유입하천인 금강본류, 진안천, 장계천 등 3개소에 설치

(55천㎡)

2. 수질예측 결과

o 수질오염방지대책의 추진으로 목표연도인 2006년 용담댐의 수질은

COD 1.82㎎/L, BOD 0.75㎎/L 수준으로 예측됨.

<예측수질>

=================================================================

목표년도         COD       BOD        T-N        T-P       Chl.a

(mg/L)     (mg/L)     (mg/L)     (mg/L)     (㎍/L)

-----------------------------------------------------------------

2006          1.82       0.75      2.399      0.031       7.3

=================================================================

3. 재원조달계획

(단위 : 백만원, %)

=================================================================

총사업비   국고   양여금   도비  시·군비   기타

-----------------------------------------------------------------

계        170,156  13,123 107,275  22,015  26,125   1,618

(100)     (8)    (63)    (13)    (15)     (1)

-----------------------------------------------------------------

하수처리장        74,376       -  38,457  18,615  17,304       -

마을하수도        30,972       -  30,972       -       -       -

하수관거          19,663       -  14,242       -   5,421       -

축산폐수처리시설  23,213       -  18,571   2,321   2,321       -

오염하천정화사업   7,191       -   5,033   1,079   1,079       -

댐내 폐기물처리   13,123  13,123       -       -       -       -

기타(인공습지,     1,618       -       -       -       -   1,618

부유물방지시설 등)

=================================================================

주) ( )내는 비율

Ⅲ. 대책의 관리

<> 세부실천계획 수립(전라북도 진안군·무주군·장수군·수자원공사 전

주지방환경관리청)

o 본 대책에 따라 소관기관별로 각 추진과제에 대한 세부실천계획을 수

립 추진

※ 전주지방환경관리청은 세부실천계획을 취합, 2002.5월말까지 환경

부에 보고

<> 수질모니터링 실시(전주지방환경관리청·수자원공사)

o 용담댐 유역내의 유입하천, 호소의 수질오염 변화추이 등을 지속적으

로 관찰하기 위하여 수질모니터링 지점 설치·운영

- 수자원공사는 댐 및 유입하천에 수질측정지점을 설치하여 운영

o 측정결과는 전주지방환경관리청·수자원공사 홈페이지에 게시하여 일

반인들이 쉽게 알 수 있도록 홍보

<> 민·관 협의회 설치·운영(전라북도)

o 용담댐 수질오염방지대책의 이행상황, 수질모니터링 결과 등을 점검·

평가하기 위하여 전라북도에 관계기관·시민단체 등이 참여하는 민·

관협의회 설치·운영

<> 추진실적 평가 및 대책의 보완(전주지방환경관리청 전라북도·수공)

o 전주지방환경관리청 주관으로 수질오염방지대책 이행상황을 연 1회

이상 평가하고 그 결과를 민·관협의회에 보고

o 전라북도에서는 대책의 추진실적 등을 토대로 3년마다 연동대책을 수

립하고 환경부장관의 승인을 얻어 추진

Ⅳ. 기관별 추진사항

1. 용담댐수질오염방지대책 세부실천계획의 총괄 및 평가

o 주관 : 전주지방환경관리청, 민·관협의회

o 협조 : 전라북도, 무주군,  진안군, 장수군, 수공

2. 환경기초시설의 확충

2-1 하수처리장 및 하수관거

o 주관 : 진안군, 무주군, 장수군

o 협조 : 전라북도, 환경부

2-2 마을하수도

o 주관 : 진안군, 무주군, 장수군

o 협조 : 전라북도

2-3 축산폐수공공처리시설

o 주관 : 무주군

o 협조 : 전라북도, 환경부

2-4 액비저장탱크 설치 등 축산분뇨 처리시설 설치·관리

o 주관 : 진안군, 무주군, 장수군

o 협조 : 전라북도

3. 비점오염원 관리대책

3-1 상수원보호구역 지정

o 주관 : 진안군, 장수군, 전라북도

3-2 비위생매립지 정비

o 주관 : 진안군, 장수군

o 협조 : 전라북도

3-3 오염하천 정화

o 주관 : 진안군, 장수군

o 협조 : 전라북도, 환경부

3-4 수변구역 지정·관리

o 주관 : 전주지방환경관리청

o 협조 : 전라북도, 환경부

4. 댐내 폐기물처리

o 주관 : 수자원공사

o 협조전라북도

5. 기타사업(인공습지, 부유물 방지시설, 수중폭기장치, 수질 감시선 등)

o 주관 : 수자원공사

o 협조 : 전라북도

<참고2> 용담댐 수질오염방지대책 투자계획

(단위 : 백만원)

=================================================================

총사업비

용량   사업 ------------------------------

기간    계     국고   양여금  도비

-----------------------------------------------------------------

총계                         170,156  13,123 107,275 22,015

-----------------------------------------------------------------

하수종말처리시설      12,400        74,376          38,457 18,615

진안진안              3,000 00∼03 13,000           6,239  3,741

장수장수              2,000 00∼03  8,700           4,297  2,498

장수장계              2,000 99∼03 15,000           7,949  3,525

진안동향                500 01∼04  4,918           2,608  1,155

진안부귀                500 01∼04  4,822           2,555  1,133

진안주천                500 01∼04  4,825           2,558  1,133

진안안천                500 01∼05  4,718           2,502  1,108

진안상전                500 01∼05  4,393           2,329  1,032

무주안성              2,900 01∼05 14,000           7,420  3,290

마을하수도시설         3,239        30,972          30,972

진안                  1,059 06까지 12,511          12,511

무주                    620         6,566           6,566

장수                  1,560        11,895          11,895

하수관거(km)             123        19,663          14,242

진안                     48 06까지 10,703           7,484

무주                      3           582             407

장수                     72         8,378           6,351

축산폐수처리시설         330        23,123          18,571  2,321

진안                    100 94∼99  7,715           6,172    772

무주                    130 02∼05  7,965           6,372    796

장수                    100 96∼99  7,533           6,027    753

오염하천정화사업         7.5         7,191           5,033  1,079

진안천                  2.3 97∼99  5,038           3,526    756

장수천                  1.0   99      153             107     23

사양천                  4.2 01∼03  2,000           1,400    300

댐내폐기물처리                      13,123 13,123

건물철거(세대)        3,048 95∼01  2,656  2,656

수목(ha)                713         1,515  1,515

잔재물(개)               68           552    552

폐콘크리트(천톤)        228         8,400  8,400

기타                                 1,618

인공습지(㎡)         54,890 00∼01    208

부유물방지시설(개소)      3  2001     600

수중폭기장치(기)         10  2006     600

수질감시선(톤)            3  2001     210

부유물수거선         재활용  2001

=================================================================

=================================================================

총사업비

-------------- 2001년 2002년 2003년 2004년 추진

시군비  기타   까지                 이후  기관

-----------------------------------------------------------------

총계          26,125 1,618 79,246 25,862 30,092 34,956

-----------------------------------------------------------------

하수종말처리시설    17,304       29,861 12,601 18,592 13,322

진안진안            3,020       13,000                      진안

장수장수            1,905        7,791    909               장수

장수장계            3,526        8,500  3,250  3,250        장수

진안동향            1,155          192  1,639  1,639  1,448 진안

진안부귀            1,134          189  1,607  1,607  1,419 진안

진안주천            1,134          189  1,609  1,609  1,418 진안

진안안천            1,108               1,573  1,573  1,572 진안

진안상전            1,032               1,464  1,464  1,465 진안

무주안성            3,290                 550  7,450  6,000 무주

마을하수도시설                    5,869  5,682  4,463 14,958

진안                             3,049  1,602  1,833  6,027 진안

무주                               365  1,540  1,130  3,531 무주

장수                             2,455  2,540  1,500  5,400 장수

하수관거(km)         5,421        8,536  1,179  3,872  6,076

진안                3,219        5,153    483  3,001  2,066 진안

무주                  175                        175    407 무주

장수                2,027        3,383    696    696  3,603 장수

축산폐수처리시설     2,321       15,248  4,800  3,165

진안                  771        7,715                      진안

무주                  797               4,800  3,165        무주

장수                  753        7,533                      장수

오염하천정화사업     1,079        5,591  1,600

진안천                756        5,038                      진안

장수천                 23          153                      장수

사양천                300          400  1,600               진안

댐내폐기물처리                   13,123                      한국

건물철거(세대)                   2,656                      수자

수목(ha)                         1,515                       원

잔재물(개)                         552                      공사

폐콘크리트(천톤)                 8,400

기타                       1,618 1,018                   600 한국

인공습지(㎡)                208   208                       수자

부유물방지시설(개소)        600   600                        원

수중폭기장치(기)            600                         600 공사

수질감시선(톤)              210   210

부유물수거선

=================================================================