영덕∼양재간 도로 민간투자사업 제안서 제출

------------------------------------------

건설교통부 교통시설국 광역도로과 2110-8320

□ 수도권 남부지역 교통개선 대책('00.  4발표)의 핵심사업으로 추진하고 있는

영덕∼양재간 고속화도로 건설 추진계획에 대하여

o 대우건설(주) 등 6개 건설회사가  서울시 서초구 염곡동(헌릉로)에서  경기도

용인시 영덕리까지 23.7㎞의 영덕∼양재간 고속도로 건설사업을 민간투자

사업으로 추진하기 위해  가칭 경수고속도로  주식회사를 설립하고  9. 16일

건설교통부에 민간부문 사업제안서를 제출하였음

□ 이에  따라 건설교통부에서는  제안서의 타당성,  국가계획과의 연계성

등을 검토하고 정부 ″민간투자사업심의위원회″의 심의를 거쳐 민간투자

사업 추진여부를 결정할 예정이라고 밝혔음

□ 민간투자사업(민간제안사업)은 제안서이  타당성 검토,  심의, 제3자 제안서

제출공고, 우선협상자 지정, 협상, 사업시행자지정, 실시계획서 작성 등에

약 1년이 소요됨에 따라 2004년부터 본격적인 공사가  시행되어 2006년말

완공될 것으로 보임

□ 영덕∼양재간 고속화  도로가 완공되면  수도권 남부지역의 만성적인

교통난의 해소는 물론 판교신도시의 간선도로 기능을 담당할 것으로 기대됨

<< 영덕∼양재간 고속도로 민간제안사업 현황 >>

□ 민간제안 사업내용

ㅇ 연    장 : 23.7㎞ (4∼6차로)

ㅇ 구    간 : 경기도 용인시∼기흥읍∼서울시 서초구 염곡동(헌릉로)

ㅇ 총사업비 : 8,114억원(보상비 별도)

ㅇ 추진방식 : BTO방식(소유권은 국가귀속, 30년간 운영)

ㅇ 공사기간 : 2004∼2006(3년)

ㅇ 사업제안자 : 경수고속도로주식회사(가칭)

※ 대우건설, 롯데건설, 신동아건설, SK건설, 성지건설, 원하종합건설

□ 사업효과

ㅇ 수도권 남부지역의 택지개발에  따른 서울 진·출입 도로망  및 경부

고속도로의 교통량 분산 효과

ㅇ 수도권 및 경기남부 지역의 교통정체 해소 및 물류비용 절감

ㅇ 주변지역간 연결도로망 구축 및 지역경제 발전

□ 향후 추진계획

ㅇ 민간투자지원센터 검토(60일)                    :  02. 9 ∼  02.11

ㅇ 정부 민간투자사업심의위원회 심의               :  02.12

ㅇ 제3자 제안공고 및 사업계획서 접수(60일)        :  02.12 ∼  03. 2

ㅇ 우선협상대상자 선정 및 실시협약 협상(3개월내)  :  03. 4 ∼  03. 7

ㅇ 민간투자사업심의위원회 심의                    :  03. 7 ∼  03. 7

ㅇ 실시협약 체결 및 사업시행자 지정               :  03. 8

ㅇ 실시계획 승인 및 공사착공                      :  04. 1