평택항·인천북항 민자항만 개발 추진

-----------------------------------

해양수산부 항만국 민자계획과 3148-6744

▣ 평택항·인천북항 민간투자 시설사업 기본계획 고시

▣ 수도권 화물 적체 해소 및 대중국 교역 기지 조성 기대

<> 수도권 수출입 화물의 원활한 처리와 대중국 교역 증대에 대비한 환황해권 물류

거점 기지 조성을 위하여 인천북항과 평택항의 민자항만개발이 본격 추진된다.

<> 해양수산부는 수도권 화물의 적체 해소를 위하여 개발이 시급한 평택항(3선석)과

인천북항(3선석)에 대하여, 사회간접자본시설에대한 민간투자법에 의거, 시설

사업기본계획을 고시하였다.

<> 평택항 민자항만은 총사업비 약 1,820억원을 투자하여 다목적 부두 3만톤급

3선석(720m)을 내항 동부두 측에 개발하는 사업이며, 인천북항 사업은 총사업비

약 1,331억원을 투자하여 일반부두 2만톤급 3선석(700m)을 개발하는 사업이다.

<> 동 민간투자사업은 인천북항과 평택항의 지리적 이점과 장래 수익성에 대한

기대로 많은 민간사업자가 관심을 가지고 있어, 민간부문의 적극적인 참여가

있을 것으로 기대되고 있다.

<> 금번에 시설사업기본계획이 고시되는 2개 사업은 금년 11월 사업 계획서 접수

및 평가를 거쳐 협상대상자를 선정하게 되며, 정부와 민간사업자간의 협상 및

실시협약 체결 등 절차를 거쳐 2005년 착공될 예정으로, 인천북항과 평택항의

활성화에 큰 몫을 담당할 것으로 기대된다.

<<평택항 다목적 부두 시설사업 >>

□ 사업 개요

○ 사업규모 : 안벽 720m(다목적부두 3만톤급 3선석)

○ 대상위치 : 경기도 평택시 포승면 포용리 전면해상

○ 추정사업비 : 약 1,820억원(2003.1.1. 불변가, 국가귀속시설 기준)

○ 공사기간 : 2005～2007(36개월)

○ 운영기간 : 50년

○ 추정수익률 : 실질IRR 9%

○ 건설분담금 : 총사업비의 40%범위 이내에서 지급

○ 운영수입보장 : 운영개시 후 5년간은 추정운영수입의 90%, 6-10년 동안은 80%,

11-15년 동안은 70%를 한도로 하고, 50%미만일 경우에는 운영

수입보장 대상에서 제외

□ 추진경위 및 향후 추진계획

○ ‘02.4-‘03.2 : 평택항 민간투자사업 타당성조사 및 기본설계용역 시행

○ ‘03. 6. : 우리부 심의위원회 개최 및 관계기관 협의

○ ‘03. 6. : 2003년도 민간투자대상사업 지정?고시

○ ‘03. 7. : 기예처 심의위원회 상정

○ ‘03. 8. : 시설사업기본계획 고시

○ ‘03. 9. : 사업설명회 개최(경기평택항만공사 회의실)

○ ‘03.11. : 사업계획서 평가 및 협상대상자 선정

<< 인천북항 일반부두 시설사업 >>

□ 사업 개요

○ 사업규모 : 안벽 700m(일반부두 2만톤급 3선석)

○ 대상위치 : 인천시 서구 원창동 전면해상

○ 추정사업비 : 약 1,331억원(2003.1.1. 불변가, 국가귀속시설 기준)

○ 공사기간 : 2005～2008(48개월)

○ 운영기간 : 50년

○ 추정수익률 : 실질IRR 9%

○ 건설분담금 : 총사업비의 40%범위 이내에서 지급

○ 운영수입보장 : 운영개시 후 5년간은 추정운영수입의 90%, 6-10년 동안은 80%,

11-15년 동안은 70%를 한도로 하고, 50%미만일 경우에는 운영

수입보장 대상에서 제외

□ 추진경위 및 향후 추진계획

○ ‘02. 5- ’03. 3 : 인천북항 민간투자사업 타당성조사 및 기본설계용역 시행

○ ‘03. 6. : 우리부 심의위원회 개최 및 관계기관 협의

○ ‘03. 6. : 2003년도 민간투자대상사업 지정?고시

○ ‘03. 7. : 기예처 심의위원회 상정

○ ‘03. 8. : 시설사업기본계획 고시

○ ‘03. 9. : 사업설명회 개최(인천지방해양수산청 회의실)

○ ‘03.11. : 사업계획서 평가 및 협상대상자 선정